내포신도시 문화시설 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역

최종보고회 개최결과 보고

□ 회의개요

❍ 일    시 : 2012. 8. 20.(月) 14:00～

❍ 장    소 : 도청 영상회의실

❍ 참 석 자 : 행정부지사, 용역추진자문단(8명), 관계공무원 등

❍ 보 고 자 : 한국산업관계연구원 임영택 책임연구원

❍ 보고내용 : 규모 및 사업비 설정, 재원조달 및 관리운영방안, 시설배치(안)

□ 용역자문단 주요의견 및 조치계획

① 도서관

❍ 전남도립도서관 사례검토 및 보존서고 규모는 도내 도서관의 납본상황을 고려하여 산출

⇒ 전남도립도서관 사례 및「공공도서관 건립․운영 매뉴얼」(문화체육관광부)을 참고하여 규모를 산출하였음(기반영)

❍ 도서관 건립비는 조달청기준은 너무 낮으므로 서울시 기준을 참조

⇒ 서울시 기준을 참고한「공공도서관 건립․운영 매뉴얼」을 참고하여 공사비 재 산출(반영, 건립비 288억원⇒490억원)

② 시각예술박물관

❍ 박물관 건립공사비가 ㎡당 250만원으로 너무 낮게 책정되었음.

⇒ 전문박물관의 특성을 살리기 위해 기존사례 중 최고가를 선정하여 공사비 재 산출(반영, 건립비 475억원⇒738억원)

❍ 박물관은 공적인 성격이 강하므로 도에서 직영 하여야 함

⇒ 초기～안정화까지는 직영운영하며, 위탁운영은 향후 검토

③ 공 연 장

❍ 공연장은 인근시설보다 크게 하고 1,500석 정도가 하여야 함.

⇒ 검토한 결과 공연장 객석의 규모 확대의 필요성 없으나 향후 문화예술의 지향점을 고려하여 대공연장을 1,100석으로 확대

□ 향후추진계획

❍ 2012. 8. 31 : 공유재산 관리계획 및 투융자심사 제출

❍ 2013. 1월중 : 설계용역 발주

- 내포신도시 문화시설 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 -

문화시설 건립 계획

시 설	최종보고회		자문결과 반영		비 고
	규 모	사 업 비	규 모	사 업 비
계	3개 시설 (도서관, 시각예술박물관, 공연장)	2,069억원 (광 356, 도비 1,713)	3개 시설 (도서관, 시각예술박물관, 공연장)	2,587억원 (광 511, 도비 2,076)	2013.～ 2020. (8년)
부지매입	- 80,659㎡(㎡당 572천원) 2013.～2017. 5년간 매입	462억원 (도비)	충남개발공사 부지조성 단가 변경 (㎡당 580천원)	468억원 (도비)	1단계
도 서 관	- 지하1층 지상4층, 연면적 11,823㎡ 사업기간 : 2013～2015(3년) 주요시설 : 열람실, 강의실, 공동보존소, 다목적실, 지하주차장(380대) 등	366억원 (광 146, 도비 220) - 도서관 288억원 (광 115, 도비 173) - 주차장 78억원 (광 31, 도비 47)	전과동일	490억원 (광 196, 도비 294) - 도서관 412억원 (광 165, 도비 247) - 주차장 78억원 (광 31, 도비 47)	1단계
시각예술 박물관	- 지상3층, 연면적 11,834㎡ 사업기간 : 2017～2020(4년) 주요시설 : 전시실, 수장고, 체험실 등	476억원 (광 190, 도비 286)	전과동일	738억원 (광 295, 도비 443)	2단계
공 연 장	- 지하2층 지상3층, 연면적 21,274㎡ 사업기간 : 2017～2020(4년) 주요시설 : 대공연장 1,000석, 소공연장 500석,	765억원 (광 20, 도비 745)	-대공영장 1,100석 -소공연장 500석	891억원 (광 20, 도비 871)	2단계

배치계획(안)

지하주차장

도서관

시각예술박물관

공연장

지하주차장