<1-1-2>	차량용 반도체 종합지원센터 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	자율주행‧차량용 반도체 종합지원센터 구축	-	‧ 도시관리계획 심의 ‧ 지방재정투자심사(중앙)	‧ 공공건축심의 ‧ 건축 설계	‧ 건축 착공	‧ 건축 공사	‧ 준공 및 센터 개관	‧ 센터 운영 ‧ 연계 사업 추가 발굴
추진실적		-	· 공모사업 선정(5월) · 도시관리 계획심의원안가결(8월) · 지방재정투자심사 조건부통과(10월)	‧ 공공건축 심의완료(1월) ‧ 현황측량 (3월) ‧ 건축 설계 공모(5월)	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시비	민자	기타
22년	확보	2,972	1,740	0	700	532	0
	집행	2,972	1,740	0	700	532	0
23년	확보	6,218	2,400	1,750	1,250	818	0
	집행	6,218	2,400	1,750	1,250	818	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당 없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년∼2026년(5년)

○ 사 업 비 : 39,900백만원(국 10,000, 도 11,100, 시 12,500, 민 6,300)

○ 사업내용 : 차량용 반도체의 기능안전 및 신뢰성 기술개발과 자율주행 사업화를 위해 전주기 지원 가능한 종합지원센터 구축‧운영

○ 수혜대상 : 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남 자동차부품산업 종합발전계획('24.~'28. / '23년 수립 예정) 반영 예정

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산업부 산업혁신기반구축사업 공모 선정('22. 5.)

- 자동차용 반도체 기능안전‧신뢰성 기반구축 사업(194억원)

○ 도시관리계획 심의(용도지역 변경) 원안가결('22. 8.)

○ '22년 제4차 지방재정투자(중앙)심사 ‘조건부’ 통과('22. 10.)

○ '23년 제1차 공공건축심의 ‘조건부’ 의결('23. 1.)

○ 현황측량 및 공공건축심의 조치계획 완료('23. 3.)

○ 건축 설계 공모('23. 6.)

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ 건축 설계 공모 선정('23. 8.)

○ 기본 및 실시설계('23. 9.)

○ 센터 건축 공사 착공('24.), 준공('26.)

산업육성과   자동차산업팀   팀장 이구주   담당자 구민경 (☎3931)