<1-2-3>	<수소에너지 융복합 산업벨트 조성>

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	20267
추진계획	블루수소 클러스터 조성	-	산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	클러스터 조성 설계	사업추진	준공
	수소산업 육성 전담기관 설치	-	산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	부지매입 및 기초실시설계	사업추진	준공
	수소(H)에너지로 전환	-	암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 실증 완료	수소터빈발전 실증 완료	에너지 전환 추진계획 수립	수소에너지 전환 완료
	수소도시 조성	-	예산편성	마스터플랜수립	공사착공	공사추진	사업준공	-
추진실적	블루수소 클러스터 조성	-	산업부 협의 추진	산업부 및 유관기업 협의 추진
	수소산업 육성 전담기관 설치	-	산업부 협의 추진	혁신연구센터 공모 신청
	수소(H)에너지로 전환	-	암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증(민간)	발전3사 추진 중
	수소도시 조성	-	예산편성 완료	마스터플랜 용역발주

⁕ 여러 개의 단위사업으로 관리 시 사업별로 구분하여 작성

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	160,458	4,660	1,750	4,020	150,028	0	0
	집행	2,000	1,000	300	700	0	0	0
24년	확보
	집행

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030

○ 사 업 비 : 4조 3,782억원(국비1,561, 도비481, 시군비720, 기타41,020)

○ 사업내용 :

- 친환경 수소 생산기지 구축, 블루수소 생산, 생산된 수소의 출하·유통 거점 확대

- 석탄화력발전소의 암모니아발전 및 수소발전 전환 추진

- 수소산업 육성 전담기관 설치

○ 수혜대상 : 도내 에너지기업

○ 중장기계획 반영 여부 : 해당없음

□ 주요 추진실적(성과)

○ 보령 수소도시 조성사업 예산편성(국비 포함) 완료(400억원, ΄22.12.)

○ 블루수소 연료전지발전소 (100MW x 4개소) 전기위원회 발전사업 허가 신청(΄22.10.)

○ 대산 수소혼소 가스터빈 시험설비 구축(΄22.10.~)

○ 청정수소 시험평가센터(KTL) 국비예산 확보(450억원, ΄22.12.)

○ 석탄화력발전 폐지지역에 대한 공모 가점 건의(΄23.3.)

○ 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 착수(΄23.3.)

○ 공모사업(수소 가스터빈 시험연구센터, 청정수소 시험평가센터) 선정을 위한 산업부 방문협의(΄23.5.)

○ 수소 가스터빈 시험연구센터 유치를 위한 관계기관 업무협약(΄23.6.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 연료전지 발전사업 송전용량 부족에 따른 발전사업 허가 난항

- 전력거래소 및 산업부 협의 추진

○ 청정수소 시험평가센터 전국 공모사업 전환

- 산업부 및 공모 주관기관 협의 추진(석탄화력발전 폐지지역 가점 배점 건의)

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ 보령 수소도시 조성사업 추진(~΄26.12.)

○ 친환경 수소 생산기지 구축 및 출하·유통 거점 확대(~΄24.12.)

○ 청정수소 시험평가센터 유치 및 준공 (~΄26.12.)

실과명 탄소중립경제과 팀명 수소에너지팀 팀장 정도영 담당자 서기원(☎3469)