<1-2-4>	LNG 냉열 활용 냉매물류단지 기반 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	,LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성	-	-	타당성 조사 완료	국비확보 대응	공사 착공	공사 완공	-
추진실적		-	공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사용역 추진	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	200	0	0	0	0	0
	집행	200	200	0	0	0	0	0
23년	확보	60	0	18	42	0	0	0
	집행	60	-	18	42	-	-	-

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026  ※(타당성조사) 2022~2023 / (기반구축) 2025~2026

○ 사 업 비 : 35,000백만원(국비 10,000, 도비 1,500, 시군비 3,500, 민자 20,000)

○ 사업내용 : LNG 인수기지의 미이용 냉열 이용을 위한 열교환기 및 냉열 이송배관 등 활용 인프라 구축

- (타당성조사) : 냉매배관 안전관리 기준 정립 및 기술성·경제성 분석

- (기반구축) : LNG 냉열 관로매설(1.5㎞) 및 열교환기·진공배관 설치 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ (’21.5.) 과제 기획서 작성 및 발굴과제 구체화

○ (’21.12.) LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성 타당성 조사 ’22년 국비 반영

○ (’22.9.~10.) LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성 타당성 조사 공모 대응 및 선정

○ (’22.11.~’23.10.) 냉매배관 안전관리 기준 정립 및 기술성·경제성 분석을 위한 타당성 조사 용역 진행

○ (‘23.2.) 착수보고회 → (‘23.6.) 중간보고회 추진

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) 산업부의 기반구축 2024년 국비 미반영

- (산업부) 타당성 조사 완료 후 기반구축 사업에 대한 공모사업 확정 후 25년 국비 반영 검토 제안(의견 통보: 산업부 → 보령시)

- 이에, 사업기간 변경 불가피 ((당초) 2024~2025 → (변경) 2025~2026))

○ (대책) 타당성 조사 완료 후 25년 국비 반영 추진

- 기반구축 공모대응과 국비확보 협의를 위한 산업부 방문(’23.10.~12.)

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ LNG 냉열 활용 기반구축 타당성 조사 완료(’23.10.)

○ 기반구축 공모 및 국비확보 대응(’23.10.~)

○ 냉열 활용기반(열교환기, 냉열 배관 등) 구축(’25.~’26.)

탄소중립경제과  탄소중립산업팀  팀장 송해훈   담당자 한승화 (☎2262)