<1-3-15>	서산공항 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	서산공항 건설	'21. 12월 예비타당성조사 착수	예비타당성조사 종합평가 시행	기본계획 수립 추진	기본설계 추진	실시설계 추진	서산공항 건설공사 착공	서산공항 건설공사 완료 ('27년 목표)
추진실적		예타착수 ('21.12.)	1차 점검회의 개최('22.10.) 사업계획 변경 및 道 검토 제시(안) 제출 (도→국토부, 기재부) 예타 종합평가 대응(15회)	예타 SOC분과위원회 개최 ('23.3.) 재기획 연구용역 추진('23.7.)	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	1,430	1,430	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027(’28년 개항)

○ 사 업 비 : 재기획 용역 완료 후 결정(예타 532억원, 국비)

○ 사업내용 : 터미널, 계류장, 유도로(L=630m), 진입도로(L=870m) 등 공항시설 설치

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22. 7. ~ 11. : 서산공항 개항 시 취항 항공사 유치활동*

* 국내 4개 항공사 서산공항 취항의향서 제출

○ ’22. 10. 13. : 예비타당성조사(’21. 12. 6. 착수)* 1차 점검회의(기재부 주관)

○ ’22. 12.  5. : 사업계획(진입도로 선형 등) 변경 제출(국토부→기재부)

○ ’23.  2. 14. : 기재부 주관 예타 2차 점검회의(KDI, 국토부, 충남도)

○ ’23.  3.  7. : 재정사업 분과위원회 개최(정무부지사·서산시장 참석 대응)

- 경제성 향상 및 종합평가(AHP) 대응 회의 15회(국토부·도 6회, 도·전문가 9회)

○ ’23.  5.  9. : 기재부 재정사업평가위원회 개최(예타 미통과)

○ ’23.  6. : 국토부, 2024년 기본 및 실시설계 용역비 10억원 반영

○ ’23.  7. : 국토부, 서산공항 재기획* 연구용역 추진(~10월)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 국토부, 재기획 연구용역 진행 시 타당성 확보 방안 검토 및 제안 필요

⇒ 총사업비 축소 방안(지질, 상·오수관로, (소)하천 유무 등 현지여건 변동) 자료 제시

⇒ 수요·편익 증가 방안 마련을 위한 현안과제 부여 및 전문가 자문(충남연, 한서대)

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ ’23. 하반기 : 국토부 주관, 재기획 연구용역 대응

실과명 도로철도항공과 미래도로항공팀 팀장 황명수  담당자 최호준 (☎4695)