<1-3-3>	<KTX천안아산역 광역복합환승센터 설치>

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	20267
추진계획	KTX천안아산역 광역복합 환승센터 설치	기본구상 용역	추진계획 수립	▸타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문․ 유치 ▸사업시행자 공모	타당성평가 및 개발계획 수립 용역	▸주민 및 관계기관 의견청취 ▸복합환승센터 지정 승인요청	▸복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정고시 ▸개발실시계획 승인고시 ▸사업착공(‘26.9.)	사업추진
추진실적		기본구상용역	추진계획 수립	▸메이저급 기업 방문(7회) ▸타 시도 벤치마킹(2회) ▸외부 자문단 구성(6월)	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600	0	600	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년~2029년

○ 사 업 비 : 870,519백만원(추정) (민자 869,300, 도비(용역) 1,219)

○ 사업내용 : 교통수단 간 효율적 연계 및 환승 체계 구축, 환승시설과 상업․문화․업무 등 지원시설을 포함한 고밀도 복합 토지이용 등

○ 수혜대상 : 충남도민 및 KTX천안아산역 이용객 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 부

□ 주요 추진실적(성과)

[2022년도]

○ ('22.10.) KTX천안아산역 광역복합환승센터 추진계획 수립

[2023년도 1/4분기]

○ ('23. 2.) 메이져 유통사 및 건설사 등 방문(1회)

○ ('23. 3.) 관계기관 실무협의 (국가철도공단, 한국철도공사, 천안시, 아산시)

[2023년도 2/4분기]

○ ('23. 4.~6.) 메이져 유통사 및 건설사 등 방문(7회)

○ ('23. 5.~6.) 관련기관 및 지역업체 협력방안 협의(5회)

○ ('23. 4.~6.) 정부기관 자문 및 유사사업 벤치마킹(5회)

○ ('23. 6.) 민간사업자 유치를 위한 외부전문가 자문단 구성

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 금리인상 등 금융시장(금융권) 침체 분위기 지속 전망에 따른 재원 조달의 어려움 및 사업성 미비 등으로 타 시도 사업포기 및 지연사례 다수

➠ 1)타 시도 사례 면밀 분석을 통해, 투자자 사업 유인 동력 확보

2)다양한 투자자 접촉을 통한 홍보 및 사업 방향 설정

○ 사업 수익성 확보를 위한 예정부지 소유자(한국철도공사, 국가철도공단, 아산시) 간 도입 환승시설 및 상업·문화·업무·숙박 등 지원시설 의견 반영

➠ 관계기관(한국철도공사, 국가철도공단, 아산시, 천안시) 회의 개최, 사전 협의 진행

○ 환승센터 개발계획에 따른 지역주민 및 전문가 의견수렴

➠ 환승센터 지정을 위해 통합교통체계법에 따라 주민·전문가 의견 청취

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ ('23 .7. ~ '24. 2.) 사업 시행 가능 사업자 유치

○ ('23.10. ~ '24. 2.) 사업시행자 공모 및 지정

○ ('24. 3. ~ '25. 2.) 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역

○ ('25. 3. ~ '25.12.) 주민 및 관계기관 의견 청취, 복합환승센터 지정 승인요청(국토부)

○ ('26. 1. ~ '26. 7.) 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정 고시

○ ('26. 9. ~ '29. 1.) 개발실시계획 승인 고시 및 공사 착공

교통정책과  교통체계TF팀  팀장 이상국  담당자 이순재 (☎4574)