<1-3-7>	중부권동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	중부권 동서횡단철도건설	제4차 국가철도망 구축계획 ‘추가검토사업’ 반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성조사 추진	예비타당성조사 등 사업 추진
추진실적			타당성 및 정책성 등 보완	중장기 전략 수립 (1차년도)	-	-	-	-

⁕ 여러 개의 단위사업으로 관리 시 사업별로 구분하여 작성

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2025 ~ 2035

○ 사 업 비 : 3,700,000백만원 (국비 3,700,000)

○ 사업내용 : 단선·복선전철 330㎞ (신설 196.7㎞, 기존 133.3㎞)

○ 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획‘추가검토사업’ 반영

- 제5차 국가철도망 구축계획(‘26~’35) ‘신규사업’ 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’21.  7. : 제4차 국가철도망 구축계획(‘21~’30) ‘추가검토사업’ 반영

○ ’21.  9. ~ ‘23. 12. : 타당성 및 정책성 등 보완

- 충청남도 철도망 구축 전략수립 연구용역(충남연구원)

○ ’22.  8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의

○ ’22. 10. : 국토부ㆍ국회 방문, 국가계획 반영 및 조기추진 건의(건설교통국장)

- 국토부(철도정책과장, ‘22.10.12.), 국회(홍문표·성일종 의원, ’22.10.18.)

○ ’22. 11. 9. : 국회 방문, 국가계획 반영 및 조기추진 건의(도로철도항공과장)

○ ’22. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립(1차년도)

- 우선순위 평가 : 충청권 동서축 연계 5개 사업 중 2순위

○ ’23.  1. : 충청권 메가시티 조성을 위한 광역 교통망 확충 건의(국토부)

○ ’23.  3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별지자체 합동추진단)

○ ’23.  7. : 사전타당성조사 용역 착수(발주기관 : 13개 시군 협력체)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 국가철도망 구축계획에 ‘신규사업’으로 반영 시, 사업 추진 가능

- 제5차 국가철도망 구축계획(‘26~’35) 반영을 위한 사전타당성조사 추진 중(~`23. 12.)으로 사업 타당성 및 경제성 확보 노력

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ (단  기) 사전타당성조사 추진, 국가철도망 구축계획 반영 건의

- 관계기관* 협력, 사전타당성조사(~`24. 6.) 추진으로 사업의 필요·당위성 등 강화

* 충남(서산, 당진, 예산, 아산, 천안), 충북(청주, 괴산, 증평), 경북(문경, 예천, 영주, 봉화, 울진)

- 제5차 국가철도망 구축계획(‘26~’35)  신규사업 반영 등 건의(`23. 12.)

※ VIP, 국회, 중앙부처 등 지속 방문 건의

○ (중장기) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 조속한 사업 추진 노력

- 예타조사(1년) → 기본계획(1년) → 기본 및 실시설계(2년) → 보상 및 공사 추진(5년)

실과명 도로철도항공과 철도물류팀   팀장 황선은  담당자 조민희 (☎2835)