<2-5-10>	수소에너지 융복합 산업벨트 조성 ※ 베이밸리 조성사업

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	20267
추진계획	수소특화단지 지정	-	산업부 협의	공모 추진	지정계획 수립	단지 지정	-	-
	수소기업 육성	-	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	-
	수소발전소 구축	-	수소발전소 인허가 지원	수소발전소 구축	수소발전소 구축	수소발전소 구축	수소발전소 구축	-
	폐플라스틱 수소생산기지 구축	-	인허가 추진	생산시설 설계	착공	공사 추진	준공	-
	수소도시 조성	-	예산편성	마스터플랜수립	공사착공	공사추진	사업준공	-
추진실적	수소특화단지 지정	-	산업부 협의	산업부 간담회 참석	-	-	-	-
	수소기업 육성	-	12개 수소 기업 지원	예비수소 기업 공모 선정	-	-	-	-
	수소발전소 구축	-	수소발전소 인허가 지원	-	-	-	-	-
	폐플라스틱 수소생산기지 구축	-	실시설계 추진	추진중	-	-	-	-
	수소도시 조성	-	예산편성 완료	마스터플랜 용역 추진	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
	집행	5,618	2,320	600	2,670	28	0	0
23년	확보	158,458	3,660	1,450	3,320	150,028	0	0
	집행	2,000	1,000	300	700	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030

○ 사 업 비 : 700,000백만원(국비 20,000, 도비 6,000, 시군비 14,000 , 민자 660,000)

○ 사업내용 : 수소에너지 융복합산업벨트 조성

- 수소특화단지 지정 추진(당진)

- 수소용품 제조 수소기업 육성 및 산업벨트화(아산)

- 산업단지 청정에너지 공급을 위한 단지 내 수소발전소 구축

- 폐플라스틱 수소생산시설 구축 및 당진 수소도시 조성

○ 수혜대상 : 도내 에너지기업

○ 중장기계획 반영 여부 : 해당없음

□ 주요 추진실적(성과)

○ ΄23년 예비수소전문기업 선정(΄23.3.~΄23.12.)

○ 당진 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 착수(΄23.3.)

○ 민자 수소연료전지발전소 2개소 준비중(당진 석문산단, 천안 목천)

※ 국제 가스가격 하락 추세이나 PF 채권시장 악화로 착공 연기

○ 재활용 플라스틱 활용 수소생산시설 세부 착공 검토(~23.5.)

○ 한화-서부발전 수소혼소(60%) 실증 성공(΄23.6.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 산업부 수소특화단지 육성방안에 적합한 산업단지 발굴 필요

- 2022년 공모계획에 부합하는 석문국가산단 지정 추진

○ 민자 수소발전소 구축사업 투자 저조

- 민간투자 촉진을 위한 홍보 및 사업자 발굴 추진

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ 당진 수소특화단지 지정 추진(~΄24.12.)

○ 당진 수소도시 조성사업 추진(~΄26.12.)

○ 민자 수소연료전지발전소 2개소 상업운전 개시(~΄26.12.)

○ 폐플라스틱 수소생산시설 준공 및 상업운전 개시(~΄25.12.)

탄소중립경제과 수소에너지팀 팀장 정도영 담당자 정광수(☎3468)