<2-5-12>	백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23.6월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	백제문화 복합단지 등 조성	-	기본구상 수립		국비 확보 및 공공부분 사업 추진, 민간 자본 유치			사업 완료
추진실적	백제문화 복합단지 등 조성	-	수립 중	-	-	-	-	-
추진계획	백제고도 지역한옥 건립 확대	-	한옥건립 지원 확대 방안 협의	mou 체결, 증액 예산 확보	한옥건립비 확대 지원	한옥건립비 확대 지원	한옥건립비 확대 지원	-
추진실적	백제고도 지역한옥 건립 확대	-	협의 완료	증액 예산 확보를 위한 한옥 관련 분야별 전문 자문단 구성	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

<백제문화 복합단지 등 조성>

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	300	0	300	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

<백제고도지역 한옥건립 확대>

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,315	2320	298	697	0	0	0
	집행	3,315	2320	298	697	0	0	0
23년	확보	2,539	1,777	229	533	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 8,800억원(국 3,435, 도 1,422, 시군 1,443, 민자 2,500)

○ 사업내용

- 백제고도(공주, 부여) 지역 한옥 건립 확대

- 백제문화권 체험-휴양-생태 특화 관광권역 조성

○ 수혜대상 : 도민 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 해당없음

□ 주요 추진실적(성과)

<백제문화 복합단지>

○ 2022년  6월 : 민선 8기 공약사업(백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성) 추진 방안 검토

○ 2022년  7월 : 사업 계획 수립(기본구상 수립 대행사업 추진 결정)

○ 2022년  9월 : 기본구상 대상사업비(3억원) 추경 확보

○ 2022년 10월 : 대행사업에 앞서 충남연구원 자체 과제 추진

○ 2022년 11월 : 기본구상 대행사업 착수

○ 2022년 12월 : 1차 사업 아이템 발굴 회의 및 충남연구원 자체 과제 완료

○ 2023년  1월 : 문화유산과, 공주, 부여, 충남연 회의

○ 2023년  3월 : 선도사업 3개 국비 반영 문체부 및 지역 국회의원 등 건의

○ 2023년  4월 : 기본구상(안)에 대한 전문가 자문회의 개최

- 다 부처 국비 확보할 수 있는 사업별 발굴도 필요 등

○ 2023년  5월 : 국비 확보 활동 전개(문체부장관/도지사, 문체부 기조실장/정무부지사)

○ 2023년  6월 : 관광객 시내권 유입을 위한 연계사업 등 추가 검토

<백제고도 한옥건립확대>

○ 2022년 12월 : 보조금 지원 상한액 확대 및 지원율 개선을 위한 문화재청 협의

○ 2023년  3월 : 백제고도 한옥건립확대 추진계획 수립

○ 2023년  5월 : 백제고도 한옥건립 확대 및 활성화 방안 문화재청 차장 방문협의 및 한옥 관련 전문가(5인) 자문단 구성

○ 2023년  6월 : 백제고도 한옥건립 확대 및 활성화 방안 모색을

위한 전문가 회의 개최

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 다른 관광지와 차별화된 관광사업 아이템 발굴의 어려움.

- 추진 중 기본구상 수립에서 차별화된 사업 발굴

○ 국비 및 민자 유치의 어려움.

- 지역 국회의원, 전문가 등과 공조하여 목표 달성

○ 한옥건립 민간지원금 확대 지원율 개선은 시․군 조례 개정 필요

○ 한옥건립사업비 도․시군 지방비 분담율 조정 및 지원액 확대 등에 따라 예산 대폭 증액 예상

□ 향후 추진계획

○ 전문가 회의 및 설문 조사 등 추진으로 한옥확대 마스터플랜(안) 수립 완료(’23. 9.)

○ 전문가 자문 등을 거쳐 백제문화 복합단지 및 체험마을 기본구상 수립(’23. 12.)

○ 국비 확보 및 민자 유치 추진(2023년 3월 ~ )

○ 시․군 고도보존육성 기본계획 변경(안) 수립(구역 확대 등)

관광진흥과 관광개발팀 팀장 서정범   담당자 김해중 (☎3888)

문화유산과 문화유산보존팀 팀장 오양숙  담당자 박용희 (☎2454)