<2-5-14>	청양 일반산업단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	청양 일반산업단지 조성	-	산업단지 지정계획 반영 및 승인신청	관계기관 협의	산업단지 승인 및 공사 착공	산업단지 준공	-	-
추진실적			산단 지정 계획 반영 (4월) 산단계획 승인 신청 (시행자→ 도, 11월)	관계기관 협의 (농지전용 협의 요청)	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	5,170				5,170
	집행	5,170	0	0	0	5,170	0	0
23년	확보	45,494	0	0	0	45,494	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당 없음

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회입법관련 이행 근거 (입법명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)				지방의회 조례 관련 이행근거 (조례명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)			비고
입법	조례
		입법명 :				조례명 :
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : '19 ~ '25년

○ 사 업 비 : 108,632백만원(민자)

○ 위    치 : 충청남도 청양군 비봉면 신원리 일원

○ 사업내용 : 산업단지 조성 A=737천㎡

○ 유치업종 : 제약·바이오, 수소연료전지 관련 업종, 친환경차 부품, 기계 및 전기장비, 고부가정밀화학, 물류 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산업단지 지정계획 반영(‘22.4.11.)

○ 산업단지계획 승인 신청(’22.12.7.)

○ 주민 등의 의견청취 및 합동설명회 개최(‘22.12.27.)

○ 관계기관 협의추진

- 농식품부 농지전용 협의 요청(‘23.5.3.)

- 환경영향평가 본안 서류 준비중

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 농지분야‧전용, 환경영향평가 등 관계기관(부서) 협의 결과에 따라 산업단지계획심의위원회 심의 지연 발생 우려되나, 관계기관(부서)와 협의하여 신속하게 추진

□ 향후 추진계획  ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ 산업단지계획위원회 심의(’23. 하반기)

○ 산업단지계획 승인 및 보상, 산업단지 공사착공(‘24년)

○ 산업단지 공사 준공(’25년)

기업지원과 산단개발팀 팀장 김성환  담당자 김예린 (☎3447)