<2-5-4>	천안역사 증·개축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	천안역사 증·개축	기본설계 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료 및 착공	공사 추진	공사 추진	공사 완료	-
추진실적		-	타장성 재조사 면제 건의 사업비 증액 편성	설계추진중 (9월 완료)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2026

○ 사 업 비 : 48,700백만원(국비 29,900, 시비 18,800)

○ 사업내용 : 연면적 8,465㎡, 증축 2,953㎡, 개량 5,207㎡

○ 중장기계획 반영 여부 : 미대상

□ 주요 추진실적(성과)

○ ‘03. 10. : 임시 선상 역사로 영업 개시(민자역사 건립시까지 3년 사용 목적)

- 천안역사㈜ SPC 설립(’05) 후 착공지연 등 문제로 민자사업 무산(‘16)

○ ‘18.  6. : 지방재정 투자사업 심사(道) 완료(총사업비 170억원)

○ ‘18. 11. : 사업시행 위·수탁 협약(철도공단&천안시, 증축 사업비 50% 분담)

○ ’19.  8. : 건축설계 착수(’23. 9. 완료 예정)

○ ’22.  6. : 민선8기 도지사 공약사항*(2-5-4. 천안역사 증･개축) 반영

* 추진계획 : 설계완료(‘23), 공사완료(’26) / 총 487억원(국비 299, 시비188)

○ ’22. 10. : 기재부･국토부 사업비 협의(국비 증액 없을시 타당성재조사 대상아님)

* 환승센터, 증축 확대 등 사업비 증가(487→800억원, 증313) *국비 299, 시비 501

○ ’23.  4. : 천안역 개량사업 도비(200억원) 지원 건의(천안시장)

○ ’23.  4. : 신한철 의원 5분 발언(사업의 원활한 추진 당부)

○ ‘23.  5. : 민선8기 2년차 시군방문 현장(천안역) 방문

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ (단  기) 천안역 증·개축 사업이 조기에 완료될 수 있도록 행정적·정책적 지원 적극 추진

- 타당성조사 및 중앙투자심사 이행, 설계 추진(천안시, 철도공단, `23.12.)

○ (중장기) 천안역 증·개축 공사 추진 및 완료

※ 공사 착공(‘23.12) → 증･개축 준공(’26)

실과명 도로철도항공과 철도물류팀   팀장 황선은  담당자 고종인 (☎4692)

2-5-19