<2-7-2>	충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	축산단지 조성	-	연구용역 (행정절차)	연구용역 추진	설명‧공청회, 환경영향평가	사업구역지정, 사업시행	사업시행, 준공	-
추진실적	축산단지 조성	-	연구용역 (행정절차)	연구용역 추진	-	-	-	-

⁕ 여러 개의 단위사업으로 관리 시 사업별로 구분하여 작성

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2022.06.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당 없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사 업 비 : 109,000백만원(국비 75,500, 도비 10,060, 시군비 23,440)

○ 사업내용 : 도내 간척지(2개소/부사‧석문 간척지)에 스마트 축사

및 분뇨에너지화 시설, 도축장, 가공장 등 단지조성

※ 단지 시설 설계(토목‧건축), 전기, 용수, 도로, 부지정지, 축사 및 관련시설 기초공사 등

○ 수혜대상 : 도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 여〔충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획〕

□ 주요 추진실적(성과)

○『충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획』수립(`22. 8.)

○ `22년 제2회 추경“간척지내 축산단지 조성 연구용역”예산 확보(`22. 9.)

○ 연구용역 추진을 위한 “과업지시 적정여부” 전문가(교수 3인) 사전검토(`22. 10.)

○ 유관기관 등(농식품부, 농어촌공사, 관계 시․군, 한돈협회) 과업 의견조회 및 계약심사 의뢰(`22. 11.)

○ 연구용역 제안요청서 등 마련, 연구용역 계약의뢰(`22. 12.)

○ 연구용역 입찰공고, 제안서 평가위원회 개최(`23. 1.) → 계약․용역착수(`23. 2.)

○ 연구용역 보고회 개최(2회 / 착수보고 : `23. 3., 중간(1차) 보고 : `23. 6.)

- 농식품부, 시‧군, 농어촌공사, 학계 등 자문 → 검토 반영

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 간척지 임대농 및 지역주민의 축산단지 조성 반대 민원 예상

○ 축산단지 용수부족 문제(지하수 염분 등) 고려 필요

○ ASF 등 질병 발생시 30만 두 가량 동시 살처분 가능 여부 우려

- (대책) 연구용역을 통한 민원해소 방안(신기술 도입 및 지원‧인센티브 등),

대책방안 등 마련, 지역 주민 순회설명회 등을 통한 홍보‧설득 추진

□ 향후 추진계획

○ 연구용역 추진(`23년) 및 용역결과를 바탕으로 설명‧공청회 등 사전절차 이행(`24년)

○ 간척지 內 스마트 축산단지 조성 사업시행(`25년), 단지조성 완료(`26년)

축산과   스마트축산정책팀   팀장 김택수   담당자 최태영(☎4101)