<2-7-3>	청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물 복합단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	임대형 스마트팜 단지 조성		1	1	2	2	2	1
추진실적			1	4	-	-	-	-
추진계획	맞춤형 스마트팜 보급		30	37	40	40	45	30
추진실적			30	37	-	-	-	-
추진계획	스마트팜 온실 신개축 지원		-	2	2	2	2	1
추진실적			-	2	-	-	-	-
추진계획	스마트농업 복합단지 조성		1개소 조성(논산 균특)
추진실적			추진중	추진중	-	-	-	-
추진계획	스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성		1개소 조성(부여 균특)
추진실적			추진중	추진중	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.말기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	23,800	0	10,790	8,910	0	4,100	0
	집행	23,800	0	10,790	8,910	0	4,100	0
23년	확보	31,406	443	12,353	11,987	0	6,623
	집행	31,406	443	12,353	11,987	0	6,623

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 199,850백만원(국비 43,60022%, 도비 62,97132%, 시군비 62,09931%, 기타 31,18015%)

○ 사업내용 : 청년 맞춤형 스마트팜 보급 및 스마트팜 단지 조성

○ 수혜대상 : 청년농업인, 중소농업인 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 부

□ 주요 추진실적(성과)

○ 스마트팜 신규사업 발굴·추진으로 청년농업인 스마트팜 진입장벽 완화

- 청년농 지원 스마트팜 보급, 임대형 스마트팜 단지 신규사업 발굴

○ '22년 2회추경 사업예산 13,000백만원*(도 7,53058%, 시군 4,57035%, 자담  9007%)편성

* 청년농 맞춤형 스마트팜 3,000백만원 / 임대형 스마트팜 단지조성 10,000백만원

○ 2022년 임대형 스마트팜 단지 조성사업 공모 및 선정(10~11월)

* 공주시 선정(부지3.5ha / 온실 2.1ha)

○ 2023년 임대형 스마트팜 단지 조성사업 공모 및 선정(2~4월)

* 보령시(부지3.3ha / 온실 2ha), 부여군(3.2/2.7), 청양군(2.8/2.5), 예산군(3.2/2.5)

※ 당초 계획 대비 3개소 추가 선정

○「민선8기 충남 스마트팜 육성정책」방향 정립(5월)

- 청년 3,000명 육성, 스마트팜 단지조성 667ha(시군별 30ha, 분산 조성)

- 스마트팜 교육 → 집단화 단지 조성 → 전후방산업 육성 및 R&D

○ 2023년 청년맞춤 스마트팜 지원 사업비 확대 편성(1회추경예산)

* 스마트팜 신축 개소당(0.3ha) 3억 → 4.5억

○ 스마트팜 확산을 위한 행정기구 구성 및 관련 협의 추진

- (행정) 도-시군 합동회의, 스마트팜 TF팀 구성 및 킥오프 회의

- (대외) 농어촌공사 비축토지 활용 협의, 교육청 폐교부지 협의, 쎈농 스마트농업분과 회의

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 시군별 스마트팜 집단화 단지 조성을 위한 사업부지 확보 어려움

→ 국·공유지, 도·시유지 등 다양한 확보방안 발굴 및 관련기관* 협의 지속

* 농림축산식품부, 농어촌공사, 충남교육청 등

○ 단지조성 사업비 부담 증가에 따른 안정적 재정확보 어려움

→ 농식품부 국비 공모사업 적극 대응을 통한 대상자 선정 만전

□ 향후 추진계획

○ 스마트팜 집단화 단지 조성부지 확보를 위한 기관 협의 지속

○「충남 스마트팜 육성정책」계획 구체화(시군 거점지역 확대 계획 등)

○ 충남 스마트팜 TF팀 운영 등 스마트팜 육성정책 추진전략 보완

스마트농업과  스마트원예팀  팀장 신장철  담당자 최종관(☎4050)