<2-8-3>	태안 해양치유센터 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 22. 12. 31 기준						23.6월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	20267
추진계획	태안 해양치유 센터 건립	실시설계 총사업비 확정	착공	정상건립 운영방안 마련	준공 운영개시	-	-	-
추진실적	태안 해양치유 센터 건립	실시설계 총사업비확정	착공	정상건립 운영방안 마련중	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,400	4,200	1,260	2,940	0	0	0
	집행	8,400	4,200	1,260	2,940	0	0	0
23년	확보	9,800	4,900	1,470	3,430	0	0	0
	집행	390	195	59	136	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년,

○ 사 업 비 : 34,000백만원(국비  17,000, 도비 5,100, 시군비 11,900)

※ 총사업비 조정(기재부) 30,400백만원(국비 15,200, 도비 4,500, 군비 10,700)

○ 사업내용 : 해양치유자원 활용 건강관리 및 휴양서비스 제공

- 해수운동 및 마사지 시설, 소금 및 피트 테라피실, 피부케어 등

○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 해양수산발전기본계획(2021-2030)

충청남도 해양수산발전계획(2015-2030)

□ 주요 추진실적(성과)

【2/4분기】

○ 해양치유센터 시설(장비) 운영관리계획 수립 용역 중간보고회 개최

- 때·곳 : ‘23. 5. 22.(월), 태안군청 중회의실 /

○ 해양치유센터 건축공사(지하층) 추진중  ※공정률 : 20.9%(’23.6.현재)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해양치유센터 내 고가장비(바데풀 등) 및 고급 인테리어가 필요한 실정으로 해수부, 기재부 총사업비 증액 변경 협의 어려움

○ 완도군 해양치유센터의 사례를 벤치마킹하여 해수부 및 기재부와 총사업비 증액 협의 대응

□ 향후 추진계획

○ 2023.  7. 해양치유센터 운영방안 마련 연구용역 최종보고회

○ 2023. 12. 치유센터 건축공사 추진 및 준공

○ 2024.  4. 치유장비설치 및 인테리어 공사 완료

○ 2024.  5. 해양치유센터 개관 및 정식운영

해양정책과 해양산업팀  팀장 류승열   담당자 최영호 (☎4765)