<2-8-4>	세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6 기준						23. 6월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				×

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	갯벌생태계 복원	사업착공 (2개소)	모니터링 (3개소), 설계착수 (2개소)	모니터링 (3개소), 사업착공 (1개소), 사업준공 (1개소)	모니터링 (3개소)	모니터링 (1개소), 사업준공 (3개소)	모니터링 (4개소), 사업준공 (1개소)
추진실적		-	모니터링 (3개소)	사업착공 (1개소)	-	-	-	`-
추진계획	갯벌식생 복원	-	기본 및 실시설계 (2개소)	사업착공 (2개소)	공사진행 (2개소)	사업준공 (2개소)
추진실적		-	기본 및 실시설계 (1개소)	-	-	-	-	-
추진계획	세계자연유산 방문자센터 건립	-	설계 완료	공사 착공	공사 진행	공사 준공	-	-
추진실적		-	부지확보	-	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023. 6.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
	집행	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
23년	확보	22,146	15,502	3,322	3,322	0	0	0
	집행

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 118,200백만원(국82,840 도17,680 시군 17,680)

○ 사업내용 : 갯벌‧염생식물 서식지 복원 등을 통한 탄소저감 및 해양생태관광 기반 마련을 통한 해양생태루트 조성

①갯벌생태계복원, ②갯벌식생복원, ③서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

○ 수혜대상 : 충남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 여〔충청남도 해양생태계 보전·관리 세부실천계획〕

□ 주요 추진실적(성과)

○ 갯벌생태계복원사업

- 준공지구 사후모니터링* 실시(3개소): 태안 근소만, 보령 무창포, 서천 유부도

* 갯벌생태계복원사업 효과성 평가 및 환류를 위한 사후관리

- 신규지구 사업위탁협약 체결(2개소): 보령 죽도, 서천 선도리

- 갯벌생태계 복원 착공(1개소 / ’23년 3월): 서산 웅도

○ 갯벌식생복원사업

- 신규지구 사업위탁협약 체결(2개소) : 서산 가로림만, 태안 근소만

- 기본 및 실시설계 착수(2개소) :서산 가로림만, 태안 근소만

○ 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

- 건축기획 용역 추진(부지선정 및 공공건축사업계획 사전검토 완료)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 갯벌생태계복원사업

- 신규지구로 선정된 2개의 사업지구가 예산편성 및 용역유찰 등의 사유로 착수가 지연되었으나 정상적 추진 중

○ 갯벌식생복원사업

- 신규사업인 갯벌식생 복원사업에 대하여 선행사례 등이 없어서 설계착수가 지연되었으나 상반기 내 착수하여 연내 설계완료 예정

○ 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

- 부지확보 난항으로 설계착수가 지연되었으나 건립부지 확보 이후, 정상적 추진 중

□ 향후 추진계획

○ 사업계획에 따라 적기에 사업이 추진될 수 있도록 관리

- 분기별 현장점검, 담당자 업무연찬을 통한 사업지연 사전방지 등

○ 신규사업 확보를 통한 해양생태계 복원 확대

- 갯벌‧식생복원 신규대상지를 추가 확보하여 국가계획 반영 추진

○ 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

- 실시설계 발주를 위한 공공건축심의 관련 행정절차 조속 추진

실과명 해양정책과  팀명 해양생태복원팀  팀장 강민수  담당자 김민호,박기남 (☎4770, 4772)