<3-12-7>	권역 감염병 전문병원 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	-	-	‧설계진행 ‧중간설계 적정성 검토(조달청) ‧인허가 신청	‧실시설계 적정성 검토(조달청) ‧공사계약체결 ‧착공	‧공사진행	‧공사진행	‧준공 및 개원	-
추진실적	-	‧사업선정 ‧설계진행 ‧계약체결 ‧계획설계 적정성 검토 (조달청)	‧설계진행 ‧중간설계 적정성 검토(조달청) ‧인허가 신청	‧총사업비 조정 관련 질병관리청-순천향대천안병원 간 협의	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023. 6. 30. 기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,507	5,790	0	0	0	2,717	0
	집행	8,507	5,790	0	0	0	2,717	0
23년	확보	14,964	2,218	0	0	0	12,746	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 추진근거: 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제8조의2(감염병병원)

§ 국가는 감염병 환자 치료 등을 위해 권역별 감염병 전문병원 설립ㆍ운영

○ 사업기간: ʼ20. 7월∼ʼ26. 1월

○ 사 업 비: 총사업비: 778억원(국비 409, 자부담 369)

○ 사업내용

- 신종감염병 환자 진료ㆍ치료를 위한 충청권 감염병 전문병원 구축

- 감염병 대응 교육ㆍ훈련 체계 마련 및 감염병 환자 이송체계 재정비

○ 중장기계획 반영 여부: 부

□ 주요 추진실적

○ ʼ20. 6. : 충청권 감염병 전문병원 공모 선정(순천향대부속천안병원)

○ ʼ20. 7. : 충청권 감염병 전문병원 지정

○ ʼ20. 11. ∼ ʼ21. 2. : 설계업체 공모 및 선정

○ ʼ21. 3. ∼ ʼ21. 7. : 계획설계

○ ʼ21. 9. ∼ ʼ21. 11. : 계획설계 적정성 검토

○ ʼ21. 11. ∼ ʼ22. 4. : 중간설계

○ ʼ22. 5. ∼ʼ22. 12. : 중간설계 적정성 검토

○ ʼ23. 1.  ~ ʼ23. 6. : 총사업비 조정 관련 질병관리청-순천향대천안병원 간 협의

□ 향후 추진계획

○ ʼ23. 7. ~ ʼ24. 2. : 중간설계 변경 및 조달청 적정성 재검토

○ ʼ24. 3. ~ ʼ24. 8. : 사업계획 적정성 재검토 및 총사업비 조정(기재부, KDI)

○ ʼ24. 9. ~ ʼ24. 12. : 실시설계 및 조달청 적정성 검토

○ ʼ25. 1. ~ ʼ28. 3. : 총사업비 확정(2개월), 공사발주 및 계약(7개월), 공사(27개월), 시운전(3개월)

감염병관리과  급성감염병대응팀  팀장 유현균  담당자 손장희(☎4392)