<3-12-9>	농어촌의료서비스 개선 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	20267
추진계획	농어촌의료서비스 개선 지원	-	공모사업 신청	설계 및 인허가	착공	준공 및 개소	-	-
추진실적	농어촌의료서비스 개선 지원	-	공모사업 선정	기본 및 실시설계	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	6,052	2,096	524	3,432	0	0	0
	집행	93	63	15	15	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년~2025년

○ 사 업 비 : 210억원(국 73, 도 18, 군 119)

○ 사업내용 : 금산군보건소 이전 신축

○ 수혜대상 : 금산군민

○ 중장기계획 반영 여부 : 제8기 충청남도 지역보건의료계획 연계 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 보건복지부 국비지원사업 최종 공모 선정

- 1차년도(’23년) 20억원 지원 확정

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 금산군「행복드림센터」이전과 연계 추진하는 사업으로

복합건축물 건립에 따른 행정절차 지연 우려

- 사전 설계자료 심의 및 월별 실집행 실적 관리 등 집행관리 철저

□ 향후 추진계획

○ (’23.1.~’24.1.) 금산군 관리계획 변경

○ (’23.6.~’24.2.) 기본설계 및 실시설계

○ (’24.2.~3.) 공사 발주 및 착공

○ (’25.6.) 준공 및 개소

보건정책과 보건행정팀 팀장 정영림   담당자 김하늬 (☎4303)