<4-14-2>	안면도 국제꽃박람회 재추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	안면도 국제 원예치유박람회 개최	-	□ 연구용역 예산확보	□ 용역착수 □ 기본계획 수립 □ AIPH 한국 위원회 협약 □ 국제행사 추진 분위기 조성 □ AIPH 공인 신청서 제출 □ 국제행사 신청서 제출	□ 국제행사 유치 대응 □ 국제행사 승인 및 AIPH 공인 □ 박람회 조직위원회 출범	□ 행사준비 (~’26.4월)	□ 박람회 개최
추진실적	안면도 국제 꽃박람회 개최	-	□ 연구용역 예산확보 □ 용역업체 공고 및 협상	□ 연구용역 시행 □ 업무협약(도‧태안군‧AIPH한국위원회) □ 관련조례 제정(입법절차 이행)	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.3.31.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026

○ 사 업 비 : 22,000백만원(국6,60030%, 지방비 등 15,40070%) * 부담비율 미확정

* 기본계획 구상 및 타당성조사 용역(1.5억원), 세부실행계획용역(4억원) 별도

○ 사업내용 : AI‧IT융복합, 스마트팜 등 원예산업의 미래비전 제시 및

지역 농림해양 인프라를 활용한 치유산업 전시‧대중화

○ 수혜대상 : 충남도민 및 전 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 해당없음

□ 주요 추진실적(성과)

○ 민선8기 도지사 공약(관리번호 4-14-2),「안면도 국제행사 개최」구체화

○ 기본계획 및 타당성 연구용역 착수보고회(‘23.2.), 중간보고회(‘23.4.)

○ 농식품부장관, 道 현안과제 설명(3회, ’23.2.16 부여 우듬지 등) ➝ 긍정검토 회신(‘23.3.3)

○ 박람회 준비계획(준비팀 구성, 15대과제 등) 지사님 방침결정(’23.3.3)

○ 박람회 자문단 회의(15명) 및 안면도 꽃지공원 현지 순람 등(‘23.3.22)

○ 태안군 공무원(군수, 실과장, 읍면동장 등) 박람회 개요 및 의미 설명(CNC, ’23.3.31, 태안군청)○ 원예박람회 개최 의견수렴 등 기존 꽃박람회와 차별화에 대한 설문조사(3회) ○ 박람회 성공개최 상호협력 업무협약 체결(‘23.4.14./도‧태안군‧AIPH한국위원회)○ 조직위원회 설립 관련 조례 제정 추진(‘23.4.~/법제심사, 심의회 등 입법절차 이행)○ 박람회 업무지원 준비팀 가동(’23.5.26, 도 2명, 태안군 1명)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 개최까지 33개월 남은시점, 박람회 준비에 필요한 이행사항 등 주요당면과제 적기추진 시급

- 연구용역 결과물 활용 기본계획 수립 및 농식품부‧기재부 대응 총력

- 국제행사 정부승인, AIPH 국제공인 절차이행 준비 철저

○ 충남도와 태안군이 박람회 성공개최 및 태안군 활성화를 목표로 공동준비,

공동추진, 공동성과를 위한 태안군 및 군민 의지 결집 필요

- 태안군, 지역 관계자 등 박람회 추진 공감대 형성 및 확대 추진

□ 향후 추진계획

○ 연구용역 완료(7월) ➝ 기본계획 수립 및 국제행사 승인‧AIPH 국제공인 준비

- 국제행사 개최계획서 제출(농식품부 7월 / 기재부 11월), AIPH 유치발표(9월)

○ 중앙부처 협업체계구축, 농촌진흥청 치유농업 및 도시농업 등 프로그램 연계 발굴○ 태안군 민관협력체계 구축, 성공 개최 군민 의지 결집 및 시너지 창출○ 「조직위 설립 및 지원에 관한 조례」 제정 *제346회 임시회(7월) 조례안 상정

스마트농업과   박람회준비TF팀   팀장 유 미   담당자 김기만(☎2525)