<4-14-5>	의병기념관 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	충남 의병기념관 건립		기본구상 수립 및 유물조사	기본계획 수립 (건축,운영)	세부운영계획 수립 지방재정 투자심사	건축설계 공모 및 실시설계	공사착공	준공 및 개관
추진실적	충남 의병기념관 건립		기본구상 수립용역 착수(10월)	기본계획 수립용역 착수(7월)	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회입법관련 이행 근거 (입법명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)				지방의회 조례 관련 이행근거 (조례명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)			비고
입법	조례
-	-	입법명 :				충청남도 의병운동 기념사업 지원에 관한 조례
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결
								○

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년

○ 사 업 비 : 300억원

○ 사업내용 : 기념관(전시실,교육실,강당), 체험관, 테마공원 조성

○ 수혜대상 : 충남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 2024~2028 중기지방재정계획 반영 예정

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22.  8.)  충남 의병기념관 건립 관련 내포문화진흥포럼 개최

○ ('23. 4.)  충남 의병기념관 건립 기본구상계획 및 유물조사 완료

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 충남 의병기념관 건립 예정지 시군 유치 치열

- 충남 의병기념관 기본계획 수립 시 건립지 결정 예정

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ ('23. 7. ~ '24. 1.) 충남 의병기념관 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사

○ ('24. 3. ~ 8.) 충남 의병기념관 세부 운영계획 수립

○ ('24. 10.) 지방재정 투자 신청

○ ('24. 11. ~ '25. 3.) 공공건축심의(건축도시과), 지방건설기술심의(건설정책과)

○ ('25. 3. ~ 12.) 건축설계 공모 및 실시설계

○ ('26. 3.)  공사 착공(건설본부)

문화정책과  도립문화시설건립팀   팀장 백상엽 담당자 김성수(☎2415)