<4-15-3>	충남 도립 예술의 전당 신축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	충남 예술의 전당 신축	타당성 조사 및 기본설계 용역	행안부 타당성 조사	지방재정투자심사, 설계공모	기본 및 실시설계	공사착공	공사진행	준공 및 개관
추진실적	충남 예술의 전당 신축	타당성 조사 및 기본설계 용역 완료	행안부 타당성 조사 완료	공유재산심의 및 공유재산관리계획 승인	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	147	0	147	0	0	0	0
23년	확보	3,000	0	3,000	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 1,409억원

○ 사업내용 : 대공연장(1,200석), 중공연장(400석) 및 공연지원 시설 조성

○ 수혜대상 : 충남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 2022 ~2026 중기지방재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('23.  4.)  공유재산심의회(원안가결)

○ ('23.  5.)  공유재산관리계획 의회 승인

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 공립예술단 정원 확정에 따른 사업규모 확대로 예산 증액 필요

- 공립예술단의 통합 및 추가 창단에 따른 정원 증가로 시설 면적 확대

⇒ 사업규모 확대에 따른 총사업비 증액은 연차별 계획에 따라 확보예정

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ ('23. 7. ~ '23.  9.)  공공건축심의(건축도시과), 지방건설기술심의(건설정책과)

○ (’23. 9. ~ ’24.  2.)  건축설계공모(건설본부)

○ ('24. 2. ~ '24. 12.)  기본 및 실시설계(건설본부)

○ ('25. 1. ~ '27. 12.)  시공자 선정 및 건축공사(건설본부)

○ ('28. 1. ~ )  충남 예술의전당 개관 준비 및 개관

문화정책과 도립문화시설건립팀 팀장 백상엽 담당자 권남영(☎3825)