<4-16-2>	탁구도시 천안, 탁구 전용체육관 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026
추진계획	탁구전용체육관건립	-	ㆍ공모사업. 신청 준비	ㆍ문체부 공모 사업 예산반영 ㆍ기본 및 실시설계	ㆍ공사착수	ㆍ공사 준공 및 운영	-	-
추진실적		-	건립 적정 장소 및 추진방법 등협의(9월) 예산협의 (11월)	기본 및 실시설계 추진	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	400	200	0	200	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회입법관련 이행 근거 (입법명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)				지방의회 조례 관련 이행근거 (조례명 작성 및 현재 해당 단계에 O 표기)			비고
입법	조례
		입법명 :				조례명 :
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2025. 6.(국비 3년간 분할지원)

○ 사 업 비 : 20억원(국 10, 시군 10)

○ 사업내용 : 연면적 1,000㎡(다목적체육관, 다목적실, 관리공간 등)

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022. 8. : 탁구전용 체육관 건립 건의(천안탁구협회 → 천안시)

○ 2022. 9. : 건립 적정장소 및 추진 방법 등 협의(도-천안시)

○ 2022. 11. : ’23년 국비 공모사업 준비를 위한 예산협의(도-천안시)

○ 2023. 2. : 공모사업 준비를 위한 협의(도-천안시)

⇨ ’23년도 생활SOC 지원사업 공모 지원, 국비 확보 후 기본 및 실시설계(’23년),

공사 착공(’24년) 및 준공(’25년)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 국민체육센터(근린생활형) 공모사업이 ’24년부터 균특으로 변경 됨에 따라 도에서 직접 선정

⇒ 탁구전용 체육관 건립에 대해 적극적으로 참여할 수 있도록 협의

□ 향후 추진계획 ※ 민선8기 임기내 추진계획

○ 공모사업 신청 및 행정절차 이행

○ 기본 및 실시설계 착수

체육진흥과 체육시설지원팀 팀장 이용석  담당자 서유덕(☎3866)