<5-18-3>	충남산림자원연구소 이전 대상지 확정

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 6. 30 기준						23. 6월 까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	충남산림자원 연구소 이전	-	타당성조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본계획수립	기본 및 실시설계	조성공사	조성공사 및 개원
추진실적		-	연구용역 착수	용역추진 (’22.11.∼’23. 11.) 이전 후보지 공모	-	-	-	-

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 ※ 2023.6.30.기준

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	70	0	70 (명시이월)	0	0	0	0
	집행	0	0		0	0	0	0
23년	확보	0	0		0	0	0	0
	집행	35	0	35	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당사항 없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ (사업기간) 2022 ~ 2027(6년간)

○ (사 업 비) 68,500백만원(도비)

○ (사업내용) 충남산림자원연구소 도내 이전

- 도내로의 이전계획 수립 및 연구소 조성사업 추진

- 유치희망 시·군 후보지 신청 접수, 입지선정기준에 따른 후보지별 여건, 관련법규 등 종합적으로 분석 및 평가하여 후보지 선정

	▪ (사업기간) 2022 ~ 2027 ▪ (사 업 비) 약 685억원(도비) ※ 연구소 이전에 수반되는 총사업비는 이전규모에 따라 추후 산정 ▪ (이전기능) 임업연구(나무병원, 포지 등), 산림문화(수목원, 치유의 숲 등), 산림교육 등 ▪ (이전규모) 최소면적 90ha 이상 * 수목원(10ha), 산림복지단지(80ha, 치유의 숲, 산림교육센터 등) 등록기준 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산림자원연구소 이전 추진계획(안) 수립(’22.7.)

○ 타 연구소(전북산림환경연구소) 이전기관 벤치마킹(’22.9.)

○ 이전 추진계획 수립을 위한 관련 분야 전문가 자문 실시(’22.10.~11.)

○ 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」추진(’22.11.~)

※ (용역사) 한국산업경쟁력연구원, (용역비) 70백만원, (기간) ’22.11.∼’23.11.

○ 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」착수보고회(’23.2.)

○ 산림자원연구소 이전 후보지 입지선정기준 마련 서면자문 실시(’23.3.)

○ 산림자원연구소 이전 후보지 입지선정기준 자문회의 개최(’23.4.)

○ 산림자원연구소 이전 후보지 공모(’23.5.23.~6.30.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 산림자원연구소 유치를 위한 시군 경쟁 과열예상 등

□ 향후 추진계획

< 단기 > 「산림자원연구소 이전 후보지 선정 용역」추진

- 후보지별 여건, 장·단점, 관련법규 등을 입지분석 실시(7~8月) 후 객관적이고 종합적인 평가(9~10月)로 이전 후보지 선정

< 중장기 > 기본․실시설계, 행정절차 이행, 조성사업 추진 등

- (1년차) 이전 대상지 확정 및 건립 방향 등 기본계획 수립('23년)

- (2~3년차) 기본 및 실시설계, 행정절차 이행 등('24~'25년)

- (4~5년차) 조성사업 추진('26~'27년)

산림자원연구소 관리과     서무팀장 서상운  담당자 최라윤(☎7313)