<1-3-11>	제2금강교 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	제2금강교 건설	설계 착수	문화재 현상변경 재심의	공사 착수	공사 추진	공사 추진	준공	운영
추진실적			문화재 현상변경 재심의(8월)	공사 착공(8월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	1,540	1,100	0	440	0	0	0
	집행	1,540	1,100	0	440	0	0	0
23년	확보	9,886	4,543	0	5,343	0	0	0
	집행	3,359	3,332	0	27	0	0	0
24년	확보	4,140	0	2,070	2,070	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 472억원(국비 236, 시비 236)

○ 사업위치 : 공주시 금성동 ~ 신관동

○ 사업내용 : 도로 건설 820m(교량 513.7m, 접속도로 306.3m / 2차로)

○ 중장기계획 반영 여부 : 행복도시 광역교통개선대책(2차) 반영 완료

□ 주요 추진실적(성과)

○ '14. 11. : 행정중심복합도시 광역교통개선대책 반영(행복청)

○ '17.  4. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ '20.  6. : 문화재 현상변경 통과  * 대상 문화재 : 공산성(유네스코 세계유산)

- (조건부) “공산성의 조망권을 위해 현 금강교와 동일한 높이로 설치”

○ '21.  8. : 하천점용허가 완료(국토부)

- 금강 홍수빈도 고려하여 현 금강교보다 1.1m 상승되어 허가(문화재 현상변경 재심의 대상)

○ '22.  8. 10. : 문화재 현상변경 재심의 → 조건부 통과

- (조건부) 교량 디자인 등은 관계전문가(문화재 전문가 포함)와 협의 후 시행

○ '22.  9. ~ : 설계 재착수 및 환경영향평가 등 행정절차 이행

○ '22. 12. : '23년 정부예산(45억원) 반영

○ '23.  3. : 설계 마무리

○ '23.  5. : 제2금강교 공사 발주 의뢰(행복청→조달청)

○ '23.  8. 25. : 공사 착공

○ '23.  8. 30. : 공사 착공식

□ 향후 추진계획

○ '26년 : 준공(예정)

도로철도항공과   도로정책팀   팀장 박상용   담당자 최호준 (☎4673)