<1-3-9>	하이패스 IC 신설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	하이패스 IC 신설	사전타당성 조사용역 완료	설계 착수 (2개소)	설계 완료 (2개소)	사업 착수 (2개소)	사업 완료 (2개소)	설계 착수 (2개소)	사업 완료 (2개소)
추진실적		사전타당성 조사용역 완료	설계 착수 (2개소)	설계추진 (2개소)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	0	300	0	0	0
	집행	300	0	0	300	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 168억원(국비 84, 시비 84)

○ 사업내용 : 하이패스IC 신설 4개소

- (세종-안성 고속도로) 동천안휴게소IC

- (경부 고속도로) 입장휴게소IC, 망향휴게소IC, 천안휴게소IC

□ 주요 추진실적(성과)

○ '22.  5. : (동천안) 기본 및 실시설계 착수(한국도로공사)

○ '22.  8. : (입장휴게소) 기본 및 실시설계 착수(한국도로공사)

○ '22.  9. 16. : 한국도로공사 방문, 조속 준공 건의

○ '22. 10. 27. : 한국도로공사 방문, 신규 사업(망향, 천안) 추진 건의

○ '22. 12. 21. : (입장휴게소) 주민설명회 실시

○ '23.  5. : (동천안) 기재부 총사업비 협의 완료

○ '23.  6. : (동천안) 한국도로공사 MOU 및 공사 발주 준비

○ '23.  9. : (망향) 타당성검토 보고서 송부(천안시→한국도로공사)

○ '23.  9. : (천안휴게소) 타당성검토 보고서 송부(천안시→한국도로공사)

○ '23. 11. : (동천안) 업무협약 체결(천안시↔한국도로공사)

○ '23. 12. : (입장휴게소) 도로공사 자체 설계검증 완료

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) 한국도로공사에 연간 추진할 수 있는 하이패스IC 건설이 제한됨에 따라, 천안지역 4개소 일시적 추진 어려움

○ (대  책) 기존 추진하고 있는 2개소(동천안, 입장) 사업을 조속히 준공하여, 순차적 추진될 수 있도록 노력

□ 향후 추진계획

○ ’23년 말 공사 착공(동천안)

○ ’24년 상반기 총사업비 분담 협의(입장휴게소)

○ ’24년 상반기 적정성 검토 완료(망향)

○ ’24년 하반기 타당성검토 보고서 송부(천안휴게소)

⇨ 기존 추진 중인 사업(2개소) 신속 마무리, 나머지 2개소 단계적 추진이 될 수 있도록 한국도로공사 지속 협의

도로철도항공과   도로정책팀   팀장 박상용   담당자 양길태 (☎4674)