<2-5-5>	천안역세권 개발

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	역세권 도새재생	어울림 센터 준공	어울림센터 개관	지구대 등 설립추진	복합환승센터 등 준공	공사추진	주상복합 등 준공
추진실적			어울림센터 개관(8월)	지장물 철거협의 (6월)
추진계획	역전지구 도시개발			투자심사	보상 추진	공사 추진	공사추진	사업완료 (’28)
추진실적				투자심사 (3~5월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
	집행	49,693	9,755	3,279	10,759	0	0	25,900
23년	확보	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
	집행	36,336	2,914	4,582	8,840	0	0	20,000
24년	확보	52,116	2,431	2,767	5,918	0	0	41,000

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 1,291,110백만원(국비 65,700, 도비 18,824, 시군비 42,086, 민자 970,750, 기타 193,750)

○ 사업내용 : 천안 역세권 일대 도시재생사업 등을 통한 원도심 활성화

- (역세권 도시재생) 도시재생어울림센터, 복합캠퍼스타운, 공영주차장, 복합환승 센터, 그린스타트업 타운, 상업‧업무 복합센터 등

- (역전지구 도시개발) 주상복합아파트, 광장 및 지하주차장 A=47,459㎡

○ 수혜대상 : 천안역 주변 원도심 주변지역

□ 주요 추진실적(성과)

○ 국토부 공모사업선정 : 중심시가지형(’17. 12.), 혁신지구(’21. 12.)

○ 혁신지구 시공사 선정(’21.12.) 및 시행계획 인가(’22.1.)

○ 도시재생어울림센터 준공(’21.6월) 및 개관식(’22.8.17.)

○ 도시재생 혁신지구 착공식(’22.11.15.)

○ 도시재생 혁신지구 지구대 착공(’23.3.)

○ 역전지구 도시개발 투자심사 의뢰(’23.3.)

○ 역전지구 도시개발 투자심사 결과(’23.5.)

○ 도시재생 혁신지구 지장물철거 협의 완료(’23.6.)

○ 도시재생 혁신지구 건축 인·허가(변경) 완료(’23.11.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ (문제점) 혁신지구 사업 추진을 위한 철도 지장물 이설 지연 및 역전지구 중앙투자심사 결과 ‘반려’(협약체결 후 재상정 의뢰 등)

○ (대책) 지장물 소유자(코레일)간 협의를 통해 사업 조기 착공(‘24.4월) 될 수 있도록 적극 노력 및 중앙투자 심사결과 보완조치 이행중(협약서 관련 국토부 협의), ’24년 상반기 협약체결 후 재상정 예정

□ 향후 추진계획

○ (역세권 도시재생) 복합캠퍼스 타운 및 지구대 준공(’24년), 복합환승 센터 준공(’26년), 주상복합 준공 등 사업완료(’26년)

○ (역전지구 도시개발) 재정투자심사, 법인설립·구역지정, 실시계획 인가(’24년), 보상추진(’25년), 공사 추진 및 완료(’26.~29.)

건축도시과   도시재생팀   팀장 윤병상   담당자 이현주 (☎4662)