<2-8-4>	세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	갯벌 생태계 복원	사업착공 (2개소)	모니터링 (3개소)	모니터링 (3개소), 사업착공 (1개소)	사업준공 (1개소) 모니터링 (3개소)	모니터링 (1개소), 사업준공 (3개소)	모니터링 (4개소), 사업준공 (1개소)
추진실적			모니터링 (3개소)	모니터링 (3개소) 사업착공 (1개소)
추진계획	갯벌식생 복원			설계착수 (2개소)	사업착공 (2개소)	사업준공 (2개소)
추진실적				기본 및 실시설계 (2개소)
추진계획	세계유산 방문자센터 건립		부지선정 설계 착수	설계완료	공사착공	공사 준공
추진실적			부지확보	건축심의 완료

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
	집행	8,601	6,026	1,287.5	1287.5	0	0	0
23년	확보	18,367	12,855	2,756	2,756	0	0	0
	집행	18,367	12,855	2,756	2,756	0	0	0
24년	확보	15,682	10,976	2,353	2,353	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 118,200백만원(국82,840 도17,680 시군17,680)

○ 사업내용 : 갯벌‧염생식물 서식지 복원 등을 통한 탄소저감 및 해양생태관광 기반 마련을 통한 해양생태루트 조성

①갯벌생태계복원, ②갯벌식생복원, ③서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

○ 수혜대상 : 충남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 해양생태계 보전·관리 세부실천계획

□ 주요 추진실적(성과)

○ 갯벌생태계복원사업

- 준공지구 사후모니터링* 실시(3개소): 태안 근소만, 보령 무창포, 서천 유부도

* 갯벌생태계복원사업 효과성 평가 및 환류를 위한 사후관리

- 갯벌생태계 복원 사업 완료(1개소 / ‘23년 7월) 서산 고파도

- 갯벌생태계 복원 착공(1개소 / ’23년 3월): 서산 웅도

- 기본 및 실시설계 착수(2개소): 보령 죽도, 서천 선도리

※ 기본 및 실시설계 용역 중지(서천 선도리)

- 신규지구 사업계획서 제출(1개소 / ‘23년 8월): 보령 원산도

○ 갯벌식생복원사업

- 기본 및 실시설계 착수(2개소) :서산 가로림만, 태안 근소만

○ 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

- 공공건축 심의위원회 심의 완료(건축기획 행정절차)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 갯벌생태계복원사업

- 사업계획 변경 검토에 따라 기본 및 실시설계 용역 중지하였으나‘24년 사업계획 변경 승인(해수부) 후 실시설계 재착수 예정(서천 선도리)

○ 갯벌식생복원사업

-‘23년 1월 설계 착수하여‘24년 상반기 설계완료 예정으로 정상 추진 중

○ 서천갯벌 세계자연유산 방문자센터 건립

- 부지확보 난항으로 설계착수가 지연되었으나 현재 건립부지 확정되어, 정상적 추진 중

□ 향후 추진계획

○ 연차별 사업계획에 따라 적기에 추진될 수 있도록 관리

해양정책과 해양생태복원팀  팀장 강민수  담당자 박기남, 안수현 (☎4772, 4773)