<3-12-2>	4대 의료원 기능 특화

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	의사인력 확충	의사인력 수급대책 수립	공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보
추진실적			공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보
추진계획	어린이병원 (천안 의료원)			소아과 전문의 채용 진료개시	소아청소년과협업체계 구축
추진실적				채용공고 및 기능보강 사업 신청
추진계획	노인질환 집중진료센터 (공주 의료원)		집중진료센터 사업계획 수립	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청	집중진료센터 설치, 장비구입 →진료센터 운영
추진실적			집중진료센터 사업계획 수립 보고회 개최	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청
추진계획	심뇌혈관 질환 센터 (서산 의료원)			심뇌혈관 진료실 설치 운영	심뇌혈관 진료실 운영	심뇌혈관 질환센터 증축	심뇌혈관 질환센터 운영
추진실적				심뇌혈관센터 설치
추진계획	산부인과 특화 (홍성 의료원)	공공산후 조리원 신설		음압분만실 설치 사업비 신청	설계착수 및 완료	긴급분만실 설치 및 운영
추진실적				사업비 확보 및 기본설계 심의

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	2,800	1,400	1,400	0	0	0	0
	집행	2,800	1,400	1,400	0	0	0	0
23년	확보	2,928	864	1,464	0	0	600	0
	집행	2,928	864	1,464	0	0	600	0
24년	확보	20,028	9,414	10,014	0	0	600	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 68,326백만원(국 31,163, 도 34,163, 기타 3,000)

○ 위    치 : 천안·공주·서산·홍성의료원

○ 사업내용 : 공공임상교수제, 대학병원 의사 파견 인건비 지원 등

- (천안) 소아청소년과 진료개시, 협업체계 구축 등 어린이전문병원 단계별추진

- (공주) 노인성 질환 관련 전문의료진 확보, 노인질환 집중진료센터 설치

- (서산) 신관증축 및 심뇌혈관질환 진료센터 (※ 서울대병원 의료협력 병행)

- (홍성) 감염병 대응 긴급 분만실 설치, 분만-산후조리-소아진료 체계 강화

□ 주요 추진실적(성과)

○ (천안) 소아청소년과 진료 개시 : ʼ23. 9. 1.

○ (공주) 2024년 기능특화 국비지원 사업계획서 제출 : ‘23. 6. 15.

- 노인집중진료센터(46억) 리모델링 ⇒ “미선정”(2023. 10월)

○ (서산) 심뇌혈관센터 개소 : ʼ23. 9. 26.

○ (홍성) 음압분만실 설치 사업비 3억원 확보 : ʼ23. 5. 1.

- 현재 기본설계 심의 中, ʼ24. 2월 완공 예정

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 의료인력의 대도시 편중 등 전문의 부족으로 공공임상교수 채용 어려움

- 전문의 근무여건 개선, 의료원 홍보 강화를 통한 전문의 채용

○ 공주 노인집중진료센터 리모델링사업“미선정”(ʼ24년, 국도비 46억원)

- 공주 노인집중진료센터 국비 확보 재추진(ʼ24년 추가 수요조사 시) 하되,
국비 확보 곤란 시 원활한 공약추진을 위해 道 자체사업으로 추진 검토

□ 향후 추진계획

○ (천안) 소아전문의 채용 및 진료개시, 협업체계 구축 등 단계별 어린이병원 추진

※ 중증 소아환자 인근 상급종합병원 및 서울 소재 종합병원과 진료협력 체계 구축

○ (공주) 노인성 질환 관련 전문의료진을 확보, 노인집중진료센터 체계 확립

○ (서산) 신관증축 및 심뇌혈관질환 진료센터 ※ 서울대병원 의료협력 병행

○ (홍성) 감염병 대응 긴급 분만실 설치, 분만-산후조리-소아진료 체계 강화

보건정책과   공공의료팀   팀장 장동화   담당자 손장희 (☎2645)