<4-14-2>	안면도 국제꽃박람회 재추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	안면도 국제 원예치유 박람회 개최		․ 연구용역 예산확보 ․ 용역착수	․ AIPH 한국 위원회 협약 ․ 국제행사 추진 분위기 조성 ․ AIPH 공인 신청서 제출 ․ 국제행사 신청서 제출	․ 국제행사 유치 대응 ․ 국제행사 승인 및 AIPH 공인 ․ 박람회 조직위원회 출범	․ 행사준비 (~’26.4월)	․ 박람회 개최
추진실적			․ 연구용역 예산확보 ․ 용역업체공고 및 협상	․ 연구용역 시행 ․ 업무협약(도‧태안군‧AIPH한국위원회) ․ 기본계획 수립 ․ 관련조례 제정 ․ 국제행사 신청서 제출 ․ AIPH공인신청발표

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	410	0	360	50	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 재단법인 국제원예치유박람회 조직위원회 설립 및 지원 조례
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결
								○

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 22,000백만원(국6,60030%, 지방비 등 15,40070%) * 부담비율 미확정

* 기본계획 구상 및 타당성조사 용역(1.5억원), 세부실행계획용역(4억원) 별도

○ 사업내용 : AI‧IT융복합, 스마트팜 등 원예산업의 미래비전 제시 및

지역 농림해양 인프라를 활용한 치유산업 전시‧대중화

□ 주요 추진실적(성과)

○ 기본계획 및 타당성 연구용역 보고[착수(2월), 중간(4월), 최종(7월)]

○ 박람회 준비계획(준비팀 구성, 15대과제 등) 도지사 방침결정(’23.3.3)

○ 박람회 자문단 회의(15명) 및 안면도 꽃지공원 현지 순람 등(‘23.3.22)

○ 박람회 성공개최 상호협력 업무협약 체결(‘23.4.14./도‧태안군‧AIPH*한국위원회)

○ 조직위원회 설립 및 지원 조례 제정(‘23.8.10. 조례안 공포)

○「2026 태안국제원예치유박람회」기본계획 수립 (‘23.8.14.)

○ 국제행사 개최계획서 제출(‘23.8.30. / 농식품부)

○ 국제원예생산자단체(AIPH) 국제공인 추진계획 발표(‘23.9.18. / 순천만)

○ 박람회 조직위원회 설립·출연 계획 수립(`23.10.6.)

○ 박람회 국제행사 개최신청서 제출(`23.12./농식품부 → 기재부)

* AIPH(국제원예생산자협회) : 벨기에 브뤼셀에 등록한 국제적 비영리협회(30개국 회원)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 개최 27개월전, 박람회 준비 이행사항 및 국제행사 정부승인 대응 철저

- 국제행사 정책성 등급 조사 및 최종 승인 대응(기재부)

- AIPH 국제공인 절차이행(총회 참석, 추진상황 발표 등)

※ 새만금 잼버리 행사 문제점 다수발생 영향으로 국제행사 승인 어려움 예상, 철저한 대응 필요

○ 충남도와 태안군이 박람회 성공개최 및 태안군 활성화를 목표로 공동준비, 공동추진, 공동성과를 위한 태안군 및 군민 의지 결집 필요

- 주민설명회, 지역협의회 등 박람회 추진 공감대 형성 및 확대 추진

□ 향후 추진계획

○ (재)태안국제원예치유박람회 조직위원회 발기인 대회, 법인 설립 등기(`24.3.)

○ 국제행사심사위원회 심의 및 정책성 등급 조사(`24.1.~8./기재부)

○ 재단법인 조직위원회 사무처(1단계/21명)파견 및 출범식 개최(`24.5.)

○ AIPH(국제원예생산자협회)신청서 제출(`24.5.), 총회 발표 및 승인(`24.9./폴란드)

스마트농업과   박람회준비TF팀   팀장 이찬원   담당자 김기만 (☎2525)