<4-14-4>	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	’23년도 국토부 정부예산 신청	예산확보, 지방재정 투자심사	실시설계 용역	사업착공	사업준공
추진실적			국비 3억 확보 및 지방재정 투자심사 완료	기본계획 완료(8월) 실시설계 용역추진

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600	300	90	210	0	0	0
	집행	600	300	90	210	0	0	0
24년	확보	8,450	4,225	1,268	2,957	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2025년

○ 사 업 비 : 146.5억원(국비 73.25 도비 21.97, 시군비 51.28)

○ 사업내용 : 금강 스마트 XR공연장, 전시장, 관광 서비스 구축

○ 수혜대상 : 충남도민(지역예술인 등)

□ 주요 추진실적(성과)

○ (’22. 5.) ’23년 국토부 ‘해안 및 내륙권 발전사업’ 정부예산 신청

○ (’22. 9.) 도-시군 협의체 구성 및 공유워크숍 개최(충남도, 3개시군)

○ (’22. 12.) 국비 3억원 확보(실시설계 용역비)

○ (’23. 3.) 사업 추진계획 수립(도)

○ (’23. 5.) ’24년도 국비 확보를 위한 국토부 방문 부처안 증액 반영(10억⇢30억)

○ (’23. 5.) ‘23년도 1회 추경 3.9억원 반영(국비 3, 도비 0.9)

○ (’23. 7.~12.) 기본계획․타당성 연구 및 실시설계 용역 추진

○ (’23. 8.) ‘24년 국비(42.25억원) 요구액 중 5억원으로 정부안 반영

○ (’23. 8.) 기본계획 연구용역 완료(3개 시군)

○ (’23. 9.~10.) ‘24년 국비 국회 증액을 위한 국토부 협의, 실시설계용역 행정절차 추진

○  (’23. 11.) ‘24년 국비 확보를 위한 국회(지역국회의원) 방문 협의

○ (’23. 12.) ‘24년 국비 5억원 확보

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 정부의 긴축 재정정책 기조로 국비확보 난항

- 지역국회의원 방문 등 국비 확보를 위한 노력 및 상시 대응 필요

※ ’24년 정부안 5억원 반영으로 ‘24년 국비 30억원(부처반영) 이상 적극적 확보 추진

□ 향후 추진계획

○ (’23. 9. ~ ‘24. 3.) 실시설계 용역 추진

○ (’24. 4. ~ 25.) 착공 및 준공

문화정책과   문화시설팀   팀장 박종태   담당자 이정숙 (☎3821)