<4-15-2>	휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 23. 12. 31. 기준						23. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	워케이션 충남 추진		간담회 및 포럼 설명회 개최 프로그램 마련	시범사업 인프라 조성 프로그램 확충, 홍보	‘워케이션 충남’시군 범위 확대 사업 추진
추진실적			간담회, 포럼 개최 및 프로그램 기획	업무협약 프로그램 운영 및 인프라 조성

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	10	0	10	0	0	0	0
	집행	10	0	10	0	0	0	0
23년	확보	420	0	420	0	0	0	0
	집행	320	0	320	0	0	0	0
24년	확보	900	0	390	510	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례
○		입법명 : 관광진흥법 일부개정법률안(장동혁 의원, ‘22.8.)				조례명 :
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결
			○

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년  ※ 2023년 시범사업 추진

○ 사 업 비 : 2,010백만원(도비 610, 시군비 1,400)

○ 사업내용 : 프로그램 운영 및 공유오피스 등 인프라 조성

○ 수혜대상 : 관광객

□ 주요 추진실적(성과)

○ 2022년 : 워케이션 충남 구축을 위한 간담회(8월)・포럼(12월) 개최

○ 2023. 2. :  2023년 충남형 워케이션 추진계획 수립

○ 2023. 3. :  2023년 워케이션 시범 프로그램 확정(보령·부여·예산·태안)

○ 2023. 3. : 충남 워케이션 활성화 업무협약(도-시군-기관・기업)

- 4개 시군(보령·부여·예산·태안), 기관·기업(7개)

○ 2023. 4. : 워케이션 충남 인프라 조성사업 대상 선정(부여·홍성·태안)

○ 2023. 4.~6. : 상반기 시범 프로그램 모집, 운영(4.25.~6.30.)

○ 2023. 6. : 워케이션 인프라 조성사업 보조금 교부 및 현장점검

○ 2023. 8. : 상반기 프로그램 만족도 조사 및 성과 결과보고

○ 2023. 9. : 인프라 및 프로그램 하반기 현장점검 실시

○ 2023. 9.~11. : 하반기 프로그램 운영

○ 2023. 12. : 인프라 준공(부여, 홍성) ※ 태안군 ‘24년 4월 준공 예정

※ 프로그램 운영현황 : 127개 기업, 450명 참가

(단위 : 명)

구분	계	보령시	부여군	예산군	태안군	비고
계	450	81	151	125	93
상반기(4.25.~6.2.)	181	28	64	38	51
하반기(9.23.~11.3.)	269	53	87	87	42

□ 향후 추진계획

○ 2024. 1. : 인프라 계획수립 및 조성 지원(2개 시군)

○ 2024. 1.~2. : 2024년 상품 기획, 운영사 선정, 시설 협약 등

○ 2024. 1~3. : 워케이션 프로그램 팸투어 및 홍보 마케팅

○ 2024. 3.~11. : 프로그램 상품 출시, 운영  ※ 8개 시군 목표

○ 2024. 11.~12. : 시설별 정산 및 운영 성과 보고

○ 2024. 12. : 인프라 조성사업 준공

⇨ 연차별 시군 범위 확대하여 전 시군 워케이션 운영 추진

관광진흥과   관광마케팅팀   팀장 박정은   담당자 김은정 (☎3884)