보고서 요약

적정기술 에듀파크(센터) 운영계획

ㅇ 충남지역 적정기술 인적․물적 자원 네트워크 구심점 역할을 수행하는 공간조성을 위해 道 차원의 전략 및 계획 마련

⇨ 민간조직이 주도적으로 교육·체험 및 3농협업 공간조성을 위한 최소한의 투자

□ 사업 개요

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12. (‘15년 : 설계, ’16년 : 준공)

❍ 사업위치 : 층남도 공유재산 中 노후 건축물 리모델링

❍ 총사업비 : 10억원(국비 5, 도비 5)

- 에코샵, DIY공방, 교육장 및 체험공간, 전시시설 등 설치

□ 건립후 운영계획

❍ (위탁방법) 공개모집(제안서 접수)을 통해 수탁기관 선정

❍ (수탁기간) 2017. 1. ~ 2018. 12. (2년간)

❍ (사용료 징수) 수탁재산의 사용허가에 따른 수입계상

- 공익목적에 부합토록 적정기술센터 운영·관리 및 상시개방

- 수탁기관은 교육비, 제품판매, 카페운영 등으로 관리에 드는 모든 경비 충당

❍ (단계별 운영 로드맵) 확산기반 마련 ➜ 운영기반 조성 ➜ 공익적 활동확산

구 분	1 단계 : 기반 조성기	2 단계 : 도약기	3 단계 : 성숙기
기 간	2015년 ~ 2016년	2017년 ~ 2018년	2019년 ~
주 관	행정기관 주도	민관 거버넌스	민간주도
목 표	인프라 구축	운영기반 조성	공익 + 수익창출

□ 활용 계획

① (교육프로그램 운영) 연중 적정기술 교육훈련사업 실시

- 에너지 자립, 바이오매스 이용, 자연환기 및 차양, 생태건축 등

② (적정기술 창업지원) 농촌형 마을협동조합 및 창업 인큐베이팅

③ (민관협업 공간) 인적·물적 자원의 지역 네트워크 구축