[붙임1]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	충남 권역 재활병원 건립
② 추진배경	1. 충청권역재활센터(충남대병원) 북서부권 접근성 부족 해소 2. 고령자 ․ 등록장애인의 급속한 증가 등 환경변화에 따른 재활수요 대비 ⇨ 공공의료재활 전달체계 구축으로 재활의료 서비스 사각 지대 해소
③ 사업개요	❍ 사업자 : 충청남도, 아산시, 영서의료재단 ❍ 위 치 : 충남 아산시 용화동 산 45-1번지 일원 14,900㎡ ❍ 규 모 : 연면적 11,406㎡(지하1층, 지상 4층), 150병상 ❍ 사업비 : 350억원(국비 135, 도비 150.5, 아산시 64.5)
④ 사업부서	장애인복지과		⑤ 담당자	시설7급 임진옥 (4278)
⑥ 선정기준	② 시설 및 전기, 통신 등을 포함한 총사업비 50억원 이상의 공사		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>
보건복지부 공모사업 신청(´17. 5. 8) 및 공모사업 조건부 승인 선정		‘17. 6. 7.	보건복지부 장애인정책국장 조남권 보건복지부 장애인정책과장 임을기 보건복지부 장애정책과 김현정 사무관 충청남도 행정부지사 남궁영 충청남도 정무부지사 허승욱 충청남도 복지보건국장 정병희 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
충남 권역 재활병원 기본계획 수립		‘17. 6. 13	충청남도지사 안희정 충청남도 행정부지사 남궁영 충청남도 정무부지사 허승욱 충청남도 복지보건국장 정병희 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진

지방재정 중앙 투자심사 신청(´17. 6. 14) 및 조건부 승인	‘17. 8. 18	행정안전부 재정정책과장 김장호 행정안전부 재정정책과 김상길 사무관 행정안전부 재정정책과 강현구 주무관 충청남도 복지보건국장 정병희 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
사업계획서 수정․보완 최종 확정 - 1차(´17. 7. 17), 2차(´17. 9. 7), 3차(´17.10.10), 최종(´17.10.27)	‘17. 10. 27	보건복지부 장애인정책과장 임을기 보건복지부 장애정책과 김현정 사무관 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
국비 1차년도 사업비 교부(´17. 6. 8) 및 지방비 부담분 확보 - 기본 및 실시설계비 10억원(국비 5, 도비 3.5, 시비 1.5)	‘17. 7. 31	보건복지부 장애인정책과장 임을기 보건복지부 장애정책과 김현정 사무관 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
국비 2차년도 사업비 확정내시(´17. 12. 8) 및 지방비 부담분 확보 - 건축비 60억원(국비 30, 도비 21, 시비 9)	‘17.12.20	보건복지부 장애인정책과장 임을기 보건복지부 장애정책과 김현정 사무관 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
사업 추진방안(발주기관) 의견조회 (´17.12.13) 및 최종(안) 검토보고	‘17.12.21	충청남도 행정부지사 남궁영 충청남도 정무부지사 허승욱 충청남도 복지보건국장 고일환 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
건립 및 의료장비 구입에 관한 업무 협약서 의견조회(´17.12.19) 및 업무 협약 체결	‘17.12.26	충청남도 복지보건국장 고일환 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
1차년도 사업비(10억원) 교부결정 (´17.12.27) 및 송금	‘17.12.28	충청남도 복지보건국장 고일환 충청남도 장애인복지과장 곽근수 충청남도 장애인복지팀장 박태진
공공건축 사업계획 사전검토 신청 (´17.1.16) 및 의견 통지	‘18. 2.13	건축도시공간연구소 본부장 서수정 건축도시공간연구소 연구위원 염철호 건축도시공간연구소 연구원 박석환 충청남도 장애인복지과장 승연희 충청남도 장애인복지팀장 박태진
건립부지내 아산시 지구단위계획 결정(변경)에 따른 조치요청	‘18. 3.20	충청남도 복지보건국장 고일환 충청남도 장애인복지과장 승연희 충청남도 장애인복지팀장 박태진
충남 권역 재활병원 건립 관련 관계기관 회의개최(´18.5.15) 및 후속조치 이행 이행 협조요청	‘18. 5.17	충청남도 장애인복지과장 승연희 충청남도 장애인복지팀장 박태진
아산 용화 남산지구 지구단위계획 결정(변경)(안) 협의 회신	‘18. 7. 3	충청남도 장애인복지과장 승연희 충청남도 장애인복지팀장 박태진
충남 권역 재활병원 사업 추진현황 및 예산집행계획 제출	‘18. 7.23	충청남도 장애인복지과장 류병구 충청남도 장애인복지팀장 박태진
충남 권역 재활병원 건립에 따른 기본 및 실시설계 제안공모(안) 의견조회	‘18. 9.12	충청남도 장애인복지과장 류병구 충청남도 장애인복지팀장 박태진
충남 권역 재활병원 건립에 따른 기본 및 실시설계 제안공모 공고	‘18.10.19	의료법인 영서의료재단 원장 권영욱 의료법인 영서의료재단 계장 손석만

충남권역 재활병원 건립 추진상황 보고(기본설계 완료에 따른 사업계획 변경)	‘19.10.22	충청남도 도지사 양승조 충청남도 행정부지사 김용찬 충청남도 저출산보건복지실장 이정구 충청남도 장애인정책과장 정한율 충청남도 장애인재활팀장 박근성
충남권역재활병원 사업계획 변경승인 요청서 및 시설설계심의 신청서 제출	‘19.11.19.	의료법인 영서의료재단 원장 권영욱 의료법인 영서의료재단 계장 손석만
충남권역재활병원 사업계획 변경승인 요청서 및 시설설계심의 신청서 제출	‘19.11.19.	충청남도 저출산보건복지실장 이정구 충청남도 장애인정책과장 정한율 충청남도 장애인재활팀장 박근성 충청남도 주무관 김동회
충남권역재활병원 시설설계(안) 구두발표 요청	‘19.11.25.	국립중앙의료원 팀장직대 이기환 국립중앙의료원 연구원 김주향
충남권역재활병원 사업계획 변경 및 시설심의 결과 통보	‘19.12.06.	보건복지부 장애인정책과장 권병기 보건복지부 행정사무관 이지연 보건복지부 주무관 남지희
충남권역재활병원 시설설계 심의 검토결과에 대한 조치 및 반영사항 제출	‘19.1.28.	의료법인 영서의료재단 원장 권영욱 의료법인 영서의료재단 계장 손석만
충남권역재활병원 시설설계 심의 검토결과에 대한 조치 및 반영사항 제출	‘19.1.28.	충청남도 장애인정책과장 이언우 충청남도 장애인재활팀장 박근성 충청남도 주무관 임진옥
충남권역재활병원 시설설계 심의 결과 통보	‘19.2.21.	보건복지부 장애인정책과장 권병기 보건복지부 행정사무관 이지연 복건복지부 주무관 남지희
충남권역재활병원 시설설계 심의(2차) 검토결과에 대한 조치 및 반영사항 제출	‘19.2.26.	의료법인 영서의료재단 원장 권영욱 의료법인 영서의료재단 계장 손석만
충남권역재활병원 시설설계 심의(2차) 검토결과에 대한 조치 및 반영사항 제출	‘19.2.26.	충청남도 장애인정책과장 이언우 충청남도 장애인재활팀장 박근성 충청남도 주무관 임진옥
충남권역재활병원 시설 심의 결과 통보	‘20.3.16.	보건복지부 장애인정책과장 권병기 보건복지부 행정사무관 이지연 보건복지부 주무관 남지희
충남권역재활병원 실시설계 잠정적완료에 따른 자료 제출(수정제출)	‘20.8.5.	의료법인 영서의료재단 원장 권영욱 의료법인 영서의료재단 계장 손석만
충남권역재활병원 건립사업 총사업비 및 운영비 일부부담에 관한 의견 제출	‘20.8.5.	의료법인 영서의료재단 원장 권영욱 의료법인 영서의료재단 계장 손석만
충남권역재활병원 추가 예산부담에 대한 의견 회신	‘20.8.10.	아산시 시장 오세현 아산시 부시장 윤찬수 아산시 문화국장 이종택 아산시 경로장애인과장 전병관 아산시 장애인시설팀장 권영희

충남권역재활병원 건립 관련 간담회 참석 요청	‘20.8.26.	충청남도 장애인복지과장 이언우 충청남도 장애인재활팀장 임방원 충청남도 주무관 배은경 충청남도 주무관 임진옥
충남권역재활병원 건립 관련 간담회 결과 보고	‘20.9.23.	충청남도 행정부지사 김용찬 충청남도 저출산보건복지실장 이정구 충청남도 장애인복지과장 이언우 충청남도 장애인재활팀장 임방원 충청남도 주무관 배은경 충청남도 주무관 임진옥
충남권역재활병원 건립 관련 자문 결과보고	‘20.9.23.	충청남도 저출산보건복지실장 이정구 충청남도 장애인복지과장 이언우 충청남도 장애인재활팀장 임방원 충청남도 주무관 배은경 충청남도 주무관 임진옥

[붙임2]

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2018-01	담당부서 작성자	복지보건국 / 장애인복지과 (임진옥/041-635-4278)
정 책 명	충남 권역 재활병원 건립
사업개요	❍ 추진배경 - 충청권역재활센터(충남대병원) 북서부권 접근성 부족 해소 - 고령자 ․ 등록장애인의 급속한 증가 등 환경변화에 따른 재활수요 대비 ⇨ 공공의료재활 전달체계 구축으로 재활의료 서비스 사각 지대 해소 ❍ 추진기간 : 2017년 ~ 2021년 ❍ 총사업비 : 350억원(국비 135, 도비 150.5, 아산시 64.5) ❍ 주요내용 : 충남 권역 재활병원 건립 및 의료장비 구입
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ❍ 17.06.07 : 보건복지부“권역별 재활병원 공모사업”신청 (17.05.08) 및 공모사업 조건부 승인 선정 - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 곽근수, 국장 정병희, 정무․행정부지사 허승욱, 남궁영 ❍ 17.06.13 :“충남권역 재활병원 건립”기본계획 수립 - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 곽근수, 국장 정병희, 정무․행정부지사 허승욱, 남궁영, 도지사 안희정 ❍ 17.08.18 : 지방재정 투자심사 신청(17.06.14) 및 조건부 승인 - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 곽근수, 국장 정병희 ❍ 17.10.27 :“충남권역 재활병원 사업계획”최종 확정(3차 수정) - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 곽근수 ❍ 17.12.26 :“충남권역 재활병원 건립”발주기관 확정 및 업무협약 - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 곽근수, 국장 고일환, 정무․행정부지사 허승욱, 남궁영 ❍ 18.02.13 :“충남권역 재활병원 건립”공공건축 사전검토 이행 - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 승연희 ❍ 18.07.03 : 지구단위계획결정(변경) 업무협의, 의견제출 등 - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 승연희, 국장 고일환 ❍ 18.09.12 :“충남권역 재활병원 건립”에 따른 기본 및 실시 설계 제안공모(안) 의견조회 - 관련자 : 장애인복지과 사무관 박태진, 과장 류병구 ❍ 19.10.22 :“충남권역 재활병원 건립” 추진상황 보고 - 기본설계 완료에 따른 사업계획 변경 ❍ 2019. 11월 ~ 2020. 3월 : 시설설계 심의 추진 ❍ 2020. 8월 : 실시설계 잠정 완료