부여군 고시 제2023-125호

웅천천 지방하천 재해복구사업 시행계획 고시

웅천천 지방하천 재해복구사업에 대하여 하천법 제27조 제3항 및 같은법 시행령 제26조의 규정에 의거 하천공사 시행계획을 다음과 같이 고시합니다.

2023년  7월  24일

부 여 군 수

1. 공 사 명: 웅천천 지방하천 재해복구사업

2. 위    치: 부여군 외산면 전장리(전장교) ~ 장항리(새들보)

3. 목    적

○ 본 과업은 충청남도 부여군 외산면 전장리 ~ 장항리 일원에 위치한 웅천천(지방하천)의 침수피해로 인한 지속적인 피해가 예상됨으로 재해복구사업을 통하여 체계적인 정비 ․ 관리를 수행함으로써 반복적인 침수피해를 방지하고 주민재산 피해를 최소화하여 인명과 재산을 보호하며, 안정된 영농생활을 통한 지역사회 발전에 기여하는데 그 목적이 있음.

4. 사업개요: 하천정비(기능복원 L=4.36km 및 개선복구 L=2.96km)

○기능복원(L=4.36km)

-제방 및 호안재설치 : 8개지구(전석쌓기(600*700*850) 6,872㎡

매트리스형돌망태(H=0.3m) 479m2)

-구조물공: 배수통관 7개소

-포 장 공: 콘크리트포장 764㎡

○개선복구(L=2.96km)

-제방 및 호안재설치 : 12개지구

-교량 : 2개소(장항2무명교 L=70.0m, B=6.0, 전장교 L=60.0m, B=8.0)

-구조물공 : 배수통관 12개소, 배수통문 2개소

-포 장 공: 콘크리트포장 L=0.95km

-부 대 공 : 1식

5. 시 행 자: 부여군수 (부여군 부여읍 사비로 33번길)

6. 하천공사의 착수 및 준공예정일: 2023. 07. ~ 2023. 10.(기능,복원)

7. 사 업 비: 24,024백만원

8. 위 치 도

9. 예정공정표

○기능복원

월별 공종별	비율 (%)	공 사 기 간						비고
		1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월
1.토 공	22.0
2.호안공	68.0
3.구조물공	6.0
4.포장공	2.0
5.부대공	2.0
누계	100	15.0	30.0	51.0	74.0	89.0	100.0

○개선복구

월별 공종별	비율 (%)	공 사 기 간												비고
		1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월	9개월	10개월	11개월	12개월
1.토 공	33.0
2.호안공	25.0
3.교량공	15.0
5.구조물공	17.0
6.포장공	5.0
7.부대공	5.0
누계	100	5.0	10.0	15.0	20.0	23.0	35.0	42.0	55.0	63.0	78.0	90.0	100.0

10. 사업비 및 자금조달 계획서

(금액 : 백만원)

사 업 명	계	2023년	2024년	비 고
웅천천 지방하천 재해복구사업	24,024	2,195		기능복원
		21,829		개선복구

11. 수용하거나 사용할 편입용지(세부내역 별첨)

구 분		필지수	편입면적(㎡)	비 고
기능복원	국공유지	19필지	11,395
	사 유 지	7필지	440
개선복구	국공유지	60필지	181,540
	사 유 지	107필지	50,754
합 계		193필지	244,129

12. 관계도서 열람 및 문의사항: 부여군 건설과 하천관리팀(☎041-830-2362)

※ 열람서류 : “편입용지조서”, “편입용지도”, “사업계획서”