<1-1-2>	차량용 반도체 종합지원센터 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	자율주행‧차량용 반도체 종합지원센터 구축		․ 도시관리계획 심의 ․ 지방재정투자심사(중앙)	․ 공공건축심의 ․ 건축 설계	‧ 건축 착공	‧ 건축 공사	‧ 준공 및 센터 개관	‧ 센터 운영 ‧ 연계 사업 추가 발굴
추진실적			․ 공모사업 선정(5월) ․ 도시관리 계획심의원안가결(8월) ․ 지방재정투자심사 조건부통과(10월)	․ 공공건축 심의완료(1월) ‧ 현황측량(3월) ‧ 건축 설계 착수(9월)	‧ 건축 설계 완료(12월) ‧ 공사 발주 및 착공(12월) ‧ 연계 추진할 신규 국비사업 발굴 추진

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	3,119	1,740	0	847	532	0	0
	집행	3,119	1,740	0	847	532	0	0
23년	확보	5,410	1,892	1,750	1,250	518	0	0
	집행	5,410	1,892	1,750	1,250	518	0	0
24년	확보	5,647	1,713	1,750	1,750	434	0	0
	집행	5,647	1,713	1,750	1,750	434	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022∼2026년(5년)

○ 사 업 비 : 39,900백만원(국 10,000, 도 11,100, 시 12,500, 민 6,300)

○ 사업내용 : 차량용 반도체의 기능안전 및 신뢰성 기술개발과 자율주행 사업화를 위해 전주기 지원 가능한 종합지원센터 구축‧운영

○ 수혜대상 : 자동차부품 및 완성차 업체 등 산업 전반, 전 국민

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남 자동차부품산업 종합발전계획('24.~'28. ) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 산업부 산업혁신기반구축사업 공모 선정(’22. 5.)

- 자동차용 반도체 기능안전‧신뢰성 기반구축 사업(194억원)

○ 도시관리계획 심의(용도지역 변경) 원안가결(’22. 8.)

○ '22년 제4차 지방재정투자(중앙)심사 ‘조건부’ 통과(’22. 10.)

○ '23년 제1차 공공건축심의 ‘조건부’ 의결(’23. 1.).

○ 현황측량 및 공공건축심의 조치계획 완료(’23. 3.)

○ 건축 설계 공모(’23. 6.)

○ 건축 설계 공모 선정(’23. 8.)

○ 기본 및 실시설계 착수(’23. 9.)

○ 기본 및 실시설계 완료(’24. 12.)

○ 센터 공사 발주 및 착공(’24. 12.)

□ 향후 추진계획

○ 센터 준공(’26. 12.)

산업육성과   자동차산업팀   팀장 이구주   담당자 고강민 (☎3931)