<1-1-5>	디스플레이 소재․부품․장비 특화단지 조기 추진

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	디스플레이 소재, 부품, 장비 특화단지 조기추진		협력R&D지원 ‧ 테스트베드 ‧ 전문인력 양성				협력R&D 지원
추진실적			테스트베드 공모 선정	(R&D) 분과위 개최, 연구개발계획서 제출 (테스트베드)클림룸 공사 완료 (인력양성)교육과정 운영(6회) (신규사업) 공모 선정 1식	(R&D) 연구개발 추진 (테스트베드) 장비 43종 48대 구축 완료 (인력양성) 재직자 교육 (5개, 128명) (신규사업) 장비 2종 2대 구축 완료

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	4,106	2,878	73	80	1,075	0	0
	집행	4,106	2,878	73	80	1,075	0	0
23년	확보	17,581	15,246	641	650	1,044	0	0
	집행	17,581	15,246	641	650	1,044	0	0
24년	확보	14,556	12,453	274	880	949	0	0
	집행	14,556	12,453	274	880	949	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021~2026년(6년)

○ 사 업 비 : 40,515백만원(국 36,505, 도 520, 시 520, 기타 2,970)

○ 사업내용 : 협력R&D지원, 테스트베드 구축, 전문인력 양성

- 수요공급 기업 공동R&D지원, 재직자 교육 계획 산업부 지속 협의 추진

○ 수혜대상 : 디스플레이 기업

○ 중장기계획 반영 여부 : 여

□ 주요 추진실적(성과)

○ 소부장뿌리기술대전 참가 및 세미나 개최(‘21.10., ’22.11., ‘23.11., ’24.11.)

○ (협력 R&D) 도내 디스플레이 선도기업 협력 기술개발 컨소시엄 구성·운영

(단위:천원)

구분	추진 내용	주관기관	사업기간	사업비	공동연구기관
1	총괄주관	(재)충남TP	‘21.12.~’26.12.	500,000	-
2	(장비분야)불량 검사기술	㈜에이치비*****	‘22.07.~’26.12.	4,930,000	4개 기관
3	(소재분야)산화물 타깃 제조기술	㈜에이치****	‘21.12.~’26.08.	5,001,000	3개 기관
4	(부품분야)BLU 기술	㈜큐에스**	‘22.07.~’26.12.	2,560,000	1개 기관
5	(소재/장비분야)Optical Bonding 기술	㈜엘엠**	‘22.07.~’26.12.	2,560,000	3개 기관
6	(소재분야) OPD 소재기술	㈜MS*****	‘22.09~’26.12.	2,467,000	3개 기관
소 계				18,018,000

- 총괄-세부 협력과제 실행계획 수립 및 네트워킹(22회), 진도점검(2회)

- 4차년도(2단계 1차년도) 국비 예산 확보 및 연구개발 과업 수행

○ (테스트베드) 장비구축, 리모델링, 비즈니스 연계 네트워크 구축 등

- 전용공간확보 : 클린룸1, 2 구축 공사('23. 10.), 유틸장비 설치('24. 11.)

- (장비구축) 총 44종 49대 중 43종 48대 구축완료

- (기술지원) '24년 수혜기업 선정·지원(총 159*건)

※ 총 159건(시험ㆍ평가ㆍ인증지원 140건, 시제품 제작 등 19건)

- (네트워크) QD연구화학회개최, KIAT 연계 사업설명회 등 4건

○ (인력양성) 공급망 내 수요기업 발굴 및 전문화 교육과정 운영

- 현장재직인력 대상 실습중심의 기술역량강화 과정 개발·운영

- 디스플레이 관련 실습 교육 연간 4~5개 과정 개설·운영

- 4차년도(2단계 1차년도) 128명 교육 수료, 만족도 88점

□ 향후 추진계획

○ (협력R&D) 연구개발 추진(~'26. 12.)

- 각 세부과제별 추진상황 모니터링 점검 추진

- 2단계 연구개발 분과별 추진점검 및 결과보고서 제출·평가

○ (테스트베드) 장비구축 및 기업지원(~'25. 6.)

- (장비구축) 1종 1대 구축 예정  ※ 총 44종 49대 구축

○ (인력양성) 5차년도 만족도 및 신규 과정 수요조사 등

- '25년 현장재직인력 품질전문화 과정 등 4개 과제, 120명 운영(~‘25.11.)

- 5차년도 연차결과보고서 작성/제출 및 전문기관 평가(‘25.12.)

	<공모 선정된 신규사업>
○ 사업개요 - 사 업 명 : 플렉서블·스트레처블 산업 창출을 위한 부착형 디스플레이 기술 기반 구축 - 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년) - 사 업 비 : 14,564.5백만원(국 10,000 도 1,290, 아산시 3,010, 민간 264.5) - 사업내용 : 부착형 디스플레이 맞춤형 공용플랫폼 구축, 모듈 부품 평가 및 상용화 - 수혜대상 : 자동차·디스플레이 기업 ○ 주요 추진실적(성과) - 산업혁신기반사업 공모 선정(‘23. 6.) - 지원 거점센터 기반 장비 구축 추진 완료(3종 3대) - 기술서비스 및 기술제품 사업화 지원 진행(58건) ○ 향후 추진계획 - 지원 거점센터 설립(~‘25. 12.) 및 운영 : 전용공간 350㎡ 규모 - 장비 구축(7대), 기술서비스 및 사업화 지원(173*건) ※ ’25년 3대·56건, ‘26년 1대·58건, ’27년 3대·59건

산업육성과   디스플레이전자팀   팀장 김영진   담당자 김지수 (☎2254)