<1-2-3>	수소에너지 융복합 산업벨트 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	블루수소 클러스터 조성		산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	클러스터 조성 설계	사업추진	준공
추진실적			산업부 협의 추진	산업부 협의 추진	산업부 정책 동향 파악
추진계획	수소산업 육성 전담기관 설치		산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	부지매입 및 기초실시설계	사업추진	준공
추진실적			산업부 협의 추진	단국대 대학원 수소에너지 학과 설치
추진계획	수소(H)에너지로 전환		암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증	암모니아 혼소 실증 완료	수소터빈발전 실증 완료	에너지 전환 추진계획 수립	수소에너지 전환 완료
추진실적			암모니아 혼소 및 수소터빈발전 실증(민간)	수소터빈 시험연구 센터 공모선정(11월)	수소 혼․전소 발전 추진 (보령, 당진)
추진계획	수소도시 조성		예산편성	마스터플랜수립	기본·실시설계 추진	착공 및 공사 추진	사업준공
추진실적			예산편성 완료	마스터플랜 수립 완료(12월)	기본·실시설계 추진 (4월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	160,458	4,660	1,750	4,020	150,028	0	0
	집행	60,430	4,660	1,750	4,020	50,000	0	0
24년	확보	110,600	42,000	11,000	19,000	0	0	38,600
	집행	110,600	42,000	11,000	19,000	0	0	38,600

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 4조 3,782억원(국비1,561, 도비481, 시군비720, 기타41,020)

○ 사업내용

- 친환경 수소 생산기지 구축, 블루수소 생산․수소드론 실증 추진, 생산된 수소의 출하·유통 거점 확대

- 석탄화력발전소의 암모니아발전 및 수소발전 전환 추진

- 수소산업 육성 전담기관 설치

○ 수혜대상 : 도내 에너지기업

□ 주요 추진실적(성과)

○ 보령 수소도시 조성사업 예산편성(국비 포함) 완료(400억원, ΄22.12.)

○ 보령 블루수소 생산플랜트 본공사 낙찰자 선정 및 계약체결

○ 청정수소 및 암모니아 혁신연구센터 1차공모 선정(62억, ΄23.05.)

- 2차 공모 선정을 위한 공모 기획서 작성 제출(΄23.12.).

○ 대산 수소혼소 가스터빈 시험설비 구축(΄22.10.~)

○ 석탄화력발전 폐지지역에 대한 공모 가점 건의(΄23.3.)

○ 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 착수(΄23.3.)

○ 수소터빈 시험연구센터 공모 대응을 위한 관계기관 협의(΄23.9.)

○ 수소터빈 시험연구센터 유치(`23.11.)

○ 보령 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 완료(`23.12.)

○ 보령 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 추진(`24.2.)

○ 서산 수소도시 지정을 위한 업무 협의(도, 서산시, 국토부)(`24. 2.)

○ 수소터빈 시험연구센터 확장을 위한 기획 회의(`24.3.)

○ 충남 수소발전소 유치를 위한 정부 건의('24. 3)

- 석탄화력 폐지지역에 수소발전 유치 및 일반수소 평가제도 개선 요청

○ 수소도시 융합포럼 참석(국토부 주관 수소도시 성과 공유)('24. 4)

○ 정부 수소특화단지 지정 계획 발표 추진계획 설명회 참석(΄24.4.)

○ SK E&S 보령 수소혼소 발전(1.2GW) 전기사업허가 신청(΄24.5.)

○ 한화임팩트 대산 수소전소 발전(132㎿) 전기사업허가 신청(΄24.5.)

○ 예비 수소특화단지 지정 관련 지자체 워크숍 참석(΄24.6.)

○ 수소터빈 시험연구센터 관계기관 업무협의(΄24.6.)

○ 보령·당진 수소도시 컨설팅 지원단 자문회의 참석(΄24.6.)

○ 국토부 수소도시 조성사업 서산시 신규 지정(΄24.9.)

○ 수소도시 기본·실시설계 추진(한국가스기술공사 위탁 등, ΄24.10.~)

○ 수소도시 컨설팅 지원단 자문회의 참석 및 컨설팅 반영 추진(΄24.11.)

○ 수소도시 기본·실시설계 추진상황 점검(΄24.12.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 블루수소 플랜트 구축을 위한 대용량 수소 수요처 부족으로 사업 민간사업자 투자 유보

- 정부, 국회 등에 수요처 발굴 및 확대를 위한 지속 건의

○ 정부 수소클러스터* 지정제도를 예비 수소특화단지 제도로 변경

- 다만, 예비 수소특화단지를 방산ㆍ원자력 연계지역으로 선정 동향

* ’21년 5개 권역(인천, 전북:새만금, 강원, 경북, 울산)에 대해 클러스터 지정 후 예타추진기획하였으나 2개 지역(경북-포항, 강원-동해ㆍ삼척) 선정

○ 충남도내 수소연료전지 보급을 위해 정부 수소입찰시장 개선 필요

- 평가방식 중 계통평가 배점이 낮아 충남도에서 사업 추진 애로

□ 향후 추진계획

○ 충남도내 수소연료전지 보급을 위해 정부 수소입찰시장 개선 노력

- 산업부 및 전력거래소에 수소입찰 평가방식 개정 지속 건의

○ 친환경 수소 생산기지 구축 및 출하·유통 거점 확대(~΄26.12.)

○ 서산시 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 착수(΄25.3.)

○ 수소산업 인재양성 프로그램 지속 추진(~΄25.12.)

- 정부 협업형 지역연계형 수소산업 혁신인재양성사업

○ 수소터빈 시험연구센터 유치 및 준공 (~΄26.12.)

○ 예비 수소특화단지 지정을 위해 시군과 협조 체계구축

- 2025년 상반기 예정된 예비 수소특화단지 공모에 대응

탄소중립경제과 수소에너지팀 팀장 함정업 담당자 정광수‧서기원 (☎3468, 2264)