<1-3-15>	서산공항 건설

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	서산공항 건설	'21. 12월 예비타당성조사 착수	예비타당성조사 종합평가 시행	기본계획 수립 추진	기본계획 수립 추진	기본 및 실시설계 추진	서산공항 건설공사 착공	서산공항 건설공사 완료 ('27년 목표)
추진실적		예타착수 ('21.12.)	1차 점검회의 개최('22.10.) 사업계획 변경 및 道 검토 제시(안) 제출 (도→국토부, 기재부) 예타 종합평가 대응(15회)	재정사업 평가 위원회 개최 ('23.5.) 재기획 연구용역 추진('23.8.~11.) 기본계획 용역 발주('23.11.)	기본계획 및 전략환경용역 착수('24.2.), 주민설명회 개최('24.8) 관계기관협의중('24.12.)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	1,430	1,430	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	1,000	1,000	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2027년

○ 사 업 비 : 509억원(국비)

○ 사업내용 : 터미널, 계류장, 유도로(L=0.6km), 진입도로(L=0.9km) 등 공항시설 설치

○ 중장기계획 반영 여부 : 제6차 공항개발 종합계획(’21~’25) 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22. 7. ~ 11. : 서산공항 개항 시 취항 항공사 유치활동*

* 국내 4개 항공사 서산공항 취항의향서 제출

○ ’22. 10. 13. : 예비타당성조사(’21. 12. 6. 착수)* 1차 점검회의(기재부 주관)

○ ’22. 12.  5. : 사업계획(진입도로 선형 등) 변경 제출(국토부→기재부)

○ ’23.  2. 14. : 기재부 주관 예타 2차 점검회의(KDI, 국토부, 충남도)

○ ’23.  3.  7. : 재정사업 분과위원회 개최(정무부지사·서산시장 참석 대응)

- 경제성 향상 및 종합평가(AHP) 대응 회의 15회(국토부·도 6회, 도·전문가 9회)

○ ’23.  5.  9. : 기재부 재정사업평가위원회 개최(예타 미통과)

○ ’23.  8.  4. : 국토부, 서산공항 재기획 연구용역 착수(~11월)

○ ’23.  8. 21. : 기재부, 2024년 기본 및 실시설계 용역비 10억원 반영

○ ’23. 11. 16. : 국토부, 서산공항 건설 재기획 용역 완료

○ ’24.  2.  7. : 국토부, 서산공항 건설 기본계획 및 전략환평 용역 착수

○ ’24.  2. 21. : 제20전투비행단 방문협의(국토부, 道, 서산시, 용역사 등)

○ ’24.  3.  7. : 국토부, 기본계획 및 전략환평 용역 착수 보고

○ ’24.  3. 21. : 제20전투비행단 2차 방문협의(국토부 항공정책실장, 道 건설교통국장)

○ ’24.  3. 22. : 서산공항 건설사업 협의체 구성(국토부, 道, 서산시, 공군 등)

○ ’24.  4.  1. : 서산공항 건설사업 협의체 1차 회의

○ ’24.  5. 24. : 국토부, 서산공항 사업대상지 공공측량 실시

○ ’24.  8. 26. : 전략환경영향평가 관련 주민설명회 개최

○ ’24. 12. 11.  : 사전재해영향성 협의 완료(행안부)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 기본계획 수립 중 총사업비 859억원으로 증가하여 기재부 협의시 타당성 재조사 직권시행 우려로 지방비 분담 필요

⇒ 분담대상을 지자체가 직접 추진할 수 있는 기반시설에 한하여
지방비 분담 협의 추진

□ 향후 추진계획

○ ’25. ~ ’26. : 기본계획 고시, 기본 및 실시설계용역 실시

○ ’27. ~ ’29. : 공사 추진 및 민항시설 개항

도로철도항공과  미래도로항공팀  팀장 조성권   담당자 김예린 (☎4695)