<1-3-3>	KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	KTX천안아산역 광역복합 환승센터 설치	기본구상 용역	추진계획 수립	․ 타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문 ․ 사업시행자 유치 및 공모, 지정 ․ 타당성 평가 및 개발 계획 수립 용역	타당성평가 및 개발계획 수립 용역(계속)	․ 주민 및 관계기관 의견청취 ․ 복합환승센터 지정 승인요청	․ 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정고시 ․ 개발실시계획 승인고시 ․ 사업착공(9월)	사업준공 (2029년)
추진실적		기본구상 용역	추진계획 수립	․메이저급 기업 방문(8회) ․ 타 시도 벤치마킹(2회) ․관계기관 협약체결(12월) ․ 개발계획 수립용역 착수	․착수보고회개최(1월) ․총괄계획단자문회의(1월) ․국토부관계기관협의(4월) ․총괄계획단자문회의(5월) ․개발계획수립용역실무회의(8월) ․부지소유자별관계기관협의(9월) ․중간보고회개최(11월) ․총괄계획단자문회의(11월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	600	0	600	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	297	0	297	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023~2029년

○ 사 업 비 : 870,519백만원(추정) (민자 869,300, 도비(용역) 1,219)

○ 사업내용 : 교통수단 간 효율적 연계 및 환승 체계 구축, 환승시설과 상업․문화․업무 등 지원시설을 포함한 고밀도 복합 토지이용 등

○ 수혜대상 : 충남도민 및 KTX천안아산역 이용객 등

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22.10.) KTX천안아산역 광역복합환승센터 추진계획 수립

○ ('23. 2.) 메이저 유통사 및 건설사 등 방문(1회)

○ ('23. 3.) 관계기관 실무협의 (국가철도공단, 한국철도공사, 천안시, 아산시)

○ ('23. 5.~6.) 관련기관 및 지역업체 협력방안 협의(5회)

○ ('23. 4.~6.) 정부기관 자문 및 유사사업 벤치마킹(5회)

○ ('23. 6.) 민간사업자 유치를 위한 외부전문가 자문단 구성

○ ('23. 8.) 메이저 유통사 및 건설사 등 방문(1회)

○ ('23. 7.~9.) 관련기관 및 지역업체 협력방안 협의(2회)

○ ('23. 9.) 관계기관 업무협약 추진계획 수립

○ ('23. 12.) 타당성평가 및 개발계획 수립용역 착수

○ ('23. 12.) 관계기관 사업참여 협약식 개최

○ ('24. 1.)『타당성평가 및 개발계획 수립』용역 착수보고회 개최

○ ('24. 1.) 총괄계획단 자문회의 개최

○ ('24. 4.) 국토교통부(광역환승과) 주관 관계기관 협력회의(협의체 구성)

○ ('24. 5.) 총괄계획단 자문회의 개최(2차)

○ ('24. 7.) KTX천안아산역 버스망 구축 추진(버스운행횟수증편)

○ ('24. 8.) 개발계획수립용역 실무회의(道 교통정책과장외 8명)

○ ('24. 9.) 부지소유자별 관계기관(아산시, 국가철도공단, 한국철도공사) 부지 관련 협의

○ ('24. 11.) 중간보고회 및 총괄계획단 자문회의 개최

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 금리인상 등 금융시장(금융권) 침체 분위기 지속 전망에 따른 재원 조달의 어려움 및 사업성 미비 등으로 타 시도 사업포기 및 지연사례 다수

➠ 1)타 시도 사례 면밀 분석을 통해, 투자자 사업 유인 동력 확보

2)민간사업자 참여 유인을 위한 개발계획에 대한 구체적인 대안 마련

○  사업 수익성 확보를 위한 예정부지 소유자(한국철도공사, 국가철도공단, 아산시)간 도입 환승시설 및 상업·문화·업무·숙박 등 지원시설 의견 반영

➠ 관계기관(한국철도공사, 국가철도공단, 아산시, 천안시) 회의 개최, 사전 협의 진행

○ 복합환승센터 개발계획수립 관련 총괄계획단 운영

➠ 국토부 복합환승센터 총괄계획단 운영 가이드라인(민간 전문가 6명 참여)

□ 향후 추진계획

○ ('23.12. ~ '25. 3.) 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역

○ ('25. 1. ~ '25. 12.) 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정 고시

○ ('26. 9. ~ '29. 5.) 개발실시계획 승인 고시 및 사업 준공

교통정책과   교통체계TF팀   팀장 이건주   담당자 노상홍 (☎4574)