<1-3-4>	GTX-C 천안·아산 연장

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	GTX-C 천안아산 연장	-	사전타당성조사 용역 착수	사전타당성조사 시행	광역철도 지정 및 민간사업 시행자 협상	민간사업 시행자 협약	사업시행	사업완료
추진실적		-	사전타당성조사 용역 착수(12월)	사전타당성 조사 완료	상생협약 (국토부-충남-경기)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	300	0	300	0	0	0	0
	집행	150	0	150	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2030년

○ 사 업 비 : 4,385,700백만원 (민자 4,385,700)  ※ GTX-C 노선 기본계획

- 천안·아산 연장 사업비 116,000백만원 추가 소요

○ 사업내용 : 74.8㎞ (기본계획, 덕정~수원), 차량기지 1개소,

- 천안·아산 연장 41㎞

○ 중장기계획 반영 여부 : 제3차 국가철도망 구축계획(2016.~2025.) 반영

- 수도권광역급행철도 의정부~금정(신설 노선구간) 표기

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’22.  6. : ‘GTX 확충 통합기획 연구용역’ 착수(국토부)

○ ’22. 12. : 道 사전타당성조사 용역 착수(~'23.12.)

○ ’23.  5. : 국토부 GTX-C 연장사업 ‘지자체 원인자 부담’ 제시

○ ’23. 10. : GTX-C 연장 6개 지자체 원인자 부담 추진 검토 건의(국토부)

○ ’23. 12. : 道 사전타당성조사 완료

○ ’23. 12. : 국토교통부 장관 아산시(온양온천역) 방문, 사업 추진 건의(아산시장)

○ ’24.  1. : GTX-C 연장 사업 타당성 검증용역 착수(철도공단, 6개 지자체)

○ ’24.  1. : 대통령 민생토론회(1. 25.) 시, GTX-C 연장 계획 발표(국토부)

○ ’24.  2. : GTX-C 연장 상생협력 협약 체결(국토부-충남도-경기도-6개 기초지자체)

○ ’24.  5 : 제5차 국가철도망 구축계획(`26~`35) 신규사업 건의서 제출(도→국토부)

○ ’24.  5. : 국회(문진석, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ ’24.  6. : 국회(이재관, 복기왕 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ ’24.  7. : GTX-C 연장 지방재정투자사업 타당성조사 의뢰(6개지자체→행안부)

○ ’24.  8. : 타당성검증용역 최종보고회 참석(국토부 주관)

○ ’24.  9. : GTX-C 연장지역 국비지원 촉구 정책토론회 참석(문진석의원 주관)

○ ’24.  9. : C 연장 원인자 부담 추진 타당성 검증용역 완료(철도공단)

○ ’24. 10. : C 연장 사업 위수탁 협약 협의 착수(공단, 6개 지자체, ㈜지티엑스씨)

○ ’24. 11. : 국토부 방문, GTX-C 추진상황 및 향후일정 등 논의

○ ’24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의

□ 향후 추진계획

○ 중앙투자심사 의뢰(‘25.4.) → 위수탁 협약 체결(’25.9.) → 설계 착수(‘25.12.)

도로철도항공과   철도물류팀   팀장 황선은   담당자 조민희 (☎2835)