<1-3-7>	중부권 동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	중부권 동서횡단철도건설	제4차 국가철도망 구축계획 ‘추가검토사업’반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성조사 추진	예비타당성조사 등 사업 추진
추진실적			충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료		국가계획 신규사업 건의

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2035년

○ 사 업 비 : 3,700,000백만원(국비)

○ 사업내용 : 단선·복선전철 330㎞ (신설 196.7㎞, 기존 133.3㎞)

○ 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획 ‘추가검토사업’ 반영

- 제5차 국가철도망 구축계획(‘26~’35) ‘신규사업’ 반영 필요

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’21.  7. : 제4차 국가철도망 구축계획(‘21~’30) ‘추가검토사업’ 반영

○ ’21.  9. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 착수

○ ’22.  8. : 충청권 행정협의회 4개 시도지사 동서축 철도망 공동추진 동의

○ ’22. 11. 9. : 국회 방문, 국가계획 반영 및 조기추진 건의(도로철도항공과장)

○ ’23.  1. : 충청권 메가시티 조성을 위한 광역 교통망 확충 건의(국토부)

○ ’23.  3. : 초광역 발전계획 대상사업 수록 검토 및 건의(충청권특별지자체 합동추진단)

○ ’23.  7. : 사전타당성조사 용역 착수(발주기관 : 13개 시군 협력체)

○ ’23.  7. : 제5차 국가철도망 구축계획(`26~`35) 수립 착수(국토부)

○ ’23. 12. : 충청남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 완료

○ ’24.  2. : 제5차 국가철도망 구축계획(‘26~’35) 신규사업 건의(국토부)

○ ’24.  5. : 중부권 동서횡단철도 사전타당성조사 중간보고회 참석

○ ’24.  5. : 국회(성일종, 문진석, 강훈식, 이정문 의원실) 방문, 국가계획 반영 지원 요청

○ ’24.  8. : 사전타당성조사 최종보고회 및 용역 완료

○ ’24.  9. : 교통연구원 방문, 제5차 국가계획 반영 필요성·당위성 피력

○ ’24. 10. : 국토부 방문, 5차 국가철도망 추진 동향파악 및 노선안 협의

○ ’24. 12. : 제5차 국가철도망계획 수립 대응 전략 자문회의

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 국가철도망 구축계획에 ‘신규사업’으로 반영 시, 사업추진 가능

- 국가계획 반영 사업 선정 기준은 ➊경제성, ➋정책성(사업추진 여건, 정책 효과, 특수평가), ➌지역 균형발전 항목을 종합 평가하여 선정

□ 향후 추진계획

○ (단  기) 사전타당성조사 추진, 국가철도망 구축계획 반영 노력(`24.~`25.)

- 관계기관* 협력, 사업의 필요성·당위성 등 피력

* 충남(서산, 당진, 예산, 아산, 천안), 충북(청주, 괴산, 증평), 경북(문경, 예천, 영주, 봉화, 울진)

※ VIP, 국회, 중앙부처 등 지속 방문 건의

○ (중장기) 국가계획 반영 후, 예타 면제 등 조속한 사업 추진 노력

- 예타조사(1년) → 기본계획(1년) → 기본 및 실시설계(2년) → 보상 및 공사 추진(5년)

도로철도항공과   철도물류팀   팀장 황선은   담당자 조민희 (☎2835)