<1-4-4>	전통시장 현대화 및 주차장 확충

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	주차환경 개선사업	13개 시장 지원	2개 시장 지원	1개 시장 지원	1개 시장 지원	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적			2개 시장 지원	(논산） 화지중앙 시장 지원	(홍성) 명동상가 지원
추진계획	노후전선□화재알림 시설정비 사업	24개 시장 지원	5개 시장 지원	1개 시장 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적			6개 시장 지원	노후시장 3개시장 지원	(태안) 동부시장
추진계획	대규모 주차장 조성			공모선정	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적				3개 시군 선정 (서산,금산,예산)	3개 시군 선정 (공주,서천,홍성)
추진계획	시설 현대화	31개 시장, 39개 사업 지원	21개 시장, 24개 사업 지원	18개 시장, 18개 사업 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적			21개 시장, 24개 사업 지원	20개 시장, 21개 사업 지원	20개 시장, 22개 사업 지원
추진계획	경영 현대화	63개 시장, 111개 사업 지원	30개 시장, 41개 사업 지원	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정	공모선정
추진실적			35개 시장, 67개 사업 지원	50개 시장, 50개 사업 지원	40개 시장, 49개 사업 지원

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	9,803	1,259	4,279	3,973	0	292	0
	집행	9,790	1,259	4,266	3,973	0	292	0
23년	확보	26,551	644	12,924	12,800	0	183	0
	집행	25,951	452	12,789	12,504	0	206	0
24년	확보	16,110	2,746	5,924	7,092	-	348	-
	집행	15,202	2,455	5,895	6,554	-	298	-

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사 업 비 : 179,162백만원(국비 2,717, 도비 88,844, 시군비 86,235, 자담 1,366)

○ 사업내용

< 중기부 공모 >

- (노후전선□화재알림시설 정비) 안전한 전통시장 환경조성을 위한 노후 전선 정비 및 화재알림시설 설치

- (주차환경개선) 고객 전용 공영주차장 신규 조성 및 증축, 개량□보수 및사설 주차장 이용 보조 지원 등

< 도 공모 >

- (대규모 주차장 조성) 고객 전용 대규모(100면 이상) 공영주차장 조성 지원

- (시설현대화) 고객□매출 증대, 상권활성화를 위한 노후 시설 개선 및 기반시설 확충 지원

- (경영현대화) 전통시장 육성 및 시장 자립화를 위한 지역□시장 특성별 맞춤형 사업 지원

○ 수혜대상 : 도내 전통시장 및 상점가

○ 중장기계획 반영 여부 : 충청남도 전통시장 활성화 5개년 계획

□ 주요 추진실적(성과)

<주차환경개선>

○ 논산 화지중앙시장 건립(24대 增), 보령 동부시장 개보수 추진(’22.4분기)

○ 논산 화지중앙시장 공영주차장 건립, 453백만원 교부(’23.1분기)

○ ’24년 전통시장 주차환경개선사업(공모) 대상지 선정(’23.2분기)

- 공영주차장 건립 : 천안성환이화시장(주차타워, 150면, 120억원)

홍성명동상가(주차타워, 229면, 184억원)

- 주차장 이용보조 : 홍성명동상가(0.6억원)

※ 선정결과 : 홍성 명동상가(주차장 조성, 이용보조)

○ ‘24년 지원계획(홍성 명동상가) 사전알림(’23.9.26.)

○ ‘24년 지원계획(홍성 명동상가) 확정알림(’23.12.)

○ 논산화지중앙시장 공영주차장 준공(’23.12.)

○ ‘25년 전통시장 주차환경개선사업(공모) 선정 평가(’24.1.~4.)

- 건  립 : 성환이화시장, 서산시 번화2로 상가, 해미읍성전통시장, 정산시장

- 개보수 : 광천전통시장(탈락)  - 이용보조 : 금산 중부시장(포기)

※ ’서산시 번화2로상가’ 균특 예산 신청서 제출

○ ‘25년 지원계획(홍성 명동상가, 서산시 번화2로상가) 사전알림(’24.9.30.)

○ ‘25년 지원계획(홍성 명동상가, 서산시 번화2로상가) 알림(’24.12.30.)

<노후전선․화재알림시설 정비>

○ 5개 시군, 6개 시장 노후전선 및 화재알림시설 설치 지원(’22. 4분기)

○ 천안 성환이화시장(노후전선 정비) 62.5백만원(’23. 1분기)

○ ’23년 노후전선정비사업 선정(2차) (’23.5.)

- 천안 성환이화시장(52.5백만원), 서산 번화2로상점가(110백만원),

태안동부시장(135백만원)

○ ’24년 중기부 공고 (’23.9.) → 사업자 선정 (’24.1.)  ※ 태안 동부시장 선정

○ ’24년 중기부 2차(’24.1.) 및 3차 공고(’24.4.)

○ ’24년 중기부 4차 공고(’24.6.~7.)  ※ 신청 시·군 없음

<대규모 주차장 조성>

○ ’23년 전통시장 대규모 주차장 조성 추진계획 수립(’23.2.)

○ 시군 공모(’23.2.~3. / 서산시, 금산군, 예산군) 및 현장평가․선정(’23.3.)

○ 보조금 교부(’23.4. / 서산시, 금산군, 예산군, 200억원)

○ 예산군, 사업계획 변경(주차타워 → 노외주차장(1, 2주차장), 5,620억원)(’23.5.)

○ 보조금 교부(3차) : 서산시 1,537백만원(도비) 교부

○ 사업 추진상황 점검(’23.9.25.)

○ 3개 시군(서산시, 금산군, 예산군) 실시설계 발주(’23.11.~12.)

○ ’24년 전통시장 대규모 주차장조성사업 지원대상 선정(’24.2.~4.)

- 시군 공모(‘24.2.~3. / 공주시, 서천군, 홍성군) 및 선정(’23.4.)

※ 3개소(공주시, 서천군, 홍성군) 선정 및 도비 교부(30억원)

○ 예산군, 사업계획 변경(사업기간 연장, ‘23.4.~‘24.6. → ‘23.4.~‘24.12.)(’24.8.29.)

○ 홍성군, 사업계획 변경(총사업비 100억원(도 50, 군 50) → 98억원(도 49, 군 49))(’24.9.20.)

○ 금산군, 사업계획 변경(사업기간 연장, ‘23.4.~‘24.12. → ‘23.4.~‘25.8.)(’24.12.4.)

<시설 현대화>

○ 11개 시군, 21개 시장, 24개 사업 진행(’22.1분기)

○ 보조금 교부 : 18개 시장, 18개 사업 지원, 10개 시군, 4,406백만원(’23.2.)

○ ’24년 전통시장 및 상점가 시설현대화 현장평가 추진(’23.8.~9. / 21개 시장)

○ (2023년 시설현대화) 추가선정 및 교부(3개 시군, 도비 274,800천원)

○ (2024년 시설현대화) ’24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 선정

- ’24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 공모(’23.2분기)

- ’24년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 우선순위 결정(’23.4분기)

- 9개 시군, 18개 시장, 21개 사업 4,315백만원 교부(’24.1분기)

○ ’24년 사업비 잔액(54백만원) 수해 피해 시장 추가지원 검토(’24.9.)

- 총 90,557천원(도 54,334, 시군 36,223) 추가 교부(‘24. 10.)

<경영 현대화>

○ 13개 시군, 35개 시장, 67개 사업 진행(’22.4분기)

○ ’23년 경영현대화 추진계획 수립 및 공모(’23.2.~3.)

○ ’23년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(1차) (’23.3.~4.)

- 공고 및 접수(3월) : 14개 시군, 31개 시장, 43개 사업, 1,234백만원

- 심사 및 선정(4월) : 14개 시군, 30개 시장, 38개 사업, 934백만원

- 도비 보조금 교부(도 → 시군, 4월) : 274백만원(도비)

○ ’23년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(2차) (’23.6.~7.)

- 공고 및 접수(6~7월) : 9개 시군, 22개 시장, 68,130천원

- 선정결과 : 9개 시군(신규 11개 시장), 16,463천원

○ ’24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업 추진계획 수립 및 공모(’24. 3.)

○ ’24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(1차) 추진

- 선정(4월) : 13개 시군, 45개 시장, 796백만원(도비 231, 시군비 470, 자부담 95)

○ ’24년 전통시장 및 상점가 경영현대화사업(2차) 추진

- 선정(12월) : 8개 시군, 22개 시장, 70백만원(도비 19, 시군비 19, 자부담 32)

□ 향후 추진계획

○ 전통시장 육성 및 시장 자립화를 위해 시설개선 및 최적화 사업 지원

- (중장기) 전통시장 디지털 전환 촉진을 위한 역량강화 및 인프라 확충

○ ’25년 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업비 교부

○ ’25년 전통시장 및 상점가 경영현대화 사업 선정·평가(1차)

○ ’25년 전통시장 및 상점가 지원사업 추진현황 점검(수시)

경제정책과   생활경제팀   팀장 강성만   담당자 이용재 (☎3310)

이예림 (☎3319)