<2-5-13>	자연치유센터 유치

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	자연치유 센터유치		예정지 사전조사	기본구상 계획 용역	기본계획 수립	착공	준공	운영
추진실적			현장조사, 청양군 업무협의	기본계획 용역 추진	기본계획 용역 완료, 대상지 변경

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	600	0	300	300	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2025년('23년) 기본계획수립 등 1년, '24~'25년)조성 2년)

○ 사 업 비 : 5,000백만원(도비 2,500, 군비 2,500)

- 기본설계비(청양군), 실시설계 및 공사비 : 5,000백만원

○ 사업내용 : 자연치유센터 건립 등

- 산림복지 체험시설 및 명상, 아로마테라피, 요가 등 치유시설

□ 주요 추진실적(성과)

○ (’23.3.3.) 우산공원(청양읍 백천리)으로 대상지 결정 회신(청양군)

- 사업비 50억 → 100억, 도비 비율 50 → 60% 증액 건의

○ (’23.5.18.) 기본설계 용역 발주(청양군)

- 우산 어린이 테마공원 조성 등에 포함, 8천만원, 디오랩(서울 소재)

○ (’23.7.17.) 착수보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등

- 지방정원조성, 관광객 킬러아이템 필요, 120억 투자효과성 등 제언

○ (’23.9.21.) 최종보고회(청양군) - 부군수, 자문위원, 용역사 등

- 우산공원 테마공원 내 포함되어 자연치유센터 기본계획 보강 필요

※ 자체 예산(청양군)으로 세부 기본계획 용역 별도 추진

○ (’23.9.) 24년 예산 반영 – 6억원(도비 3, 군비 3)

※ 총25억원 요청하였으나 이월이 예상되어 본예산에 실시설계비만 반영

(필요시 추경에 사업비 요청–도 예산담당관실)

○ (’23.10.) 자연치유센터 대상지 변경(백천리 우산 → 고추문화마을)

○ (’23.12.) ’24년 예산 확정 – 6억원(도비3, 군비3)  * 특별조정교부금 별도지원 계획

○ (’24. 2.) 자연치유센터 건립 기본계획 수립 용역 완료

○ (’24. 3.) 자연치유센터 건립 건축 기획 용역 추진

○ (’24. 4.) 고추문화마을 지내 사업추진부서 실무담당자 협의

- 고추문화마을 내 추진사업(청양자연치유센터, 사회적공동체 특화단지)

상호협력 위한 부서협의(연계프로그램, 건축물배치, 주차장 공유)

○ (’24. 4.~9.) 자연치유센터 건립 건축 기획 용역 변경 추진

○ (’24. 5.~9.) 자연치유센터 지구단위계획 결정용역 변경 추진

→ 산림자원연구소 대상지 이전 결정 관련

○ (’24. 10.) 자연치유센터 대상지 변경(고추문화마을→고운식물원 일원)

※ 산림자원연구소 이전 대상지 청양군 확정(´24.8.)에 따른 대상지 변경

○ (’24. 12.) 산림자원연구소 이전 기본구상(계획) 타당성 조사 용역 착수

※ 과업 내 자연치유센터 건립 추가 협상(´24.12.6., ㈜도화엔지니어링)

□ 향후 추진계획

○ 산림자원연구소 이전 계획과 연계하여 자연치유센터 건립 추진

○ 기본구상(계획) 및 타당성 조사(’24. 1.~ 10.)

산림자원과   연구소이전TF팀   팀장 김창기   담당자 강동훈 (☎2574)