<2-5-2>	천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	천안 종축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	사업계획 수립용역 착수	자문회의 및 관계기관 협의 등	사업계획 수립	종축장 이전 대응, 연구용역 추진	산업단지 계획 수립·신청	산업단지 계획 승인	국가산단 조성완료
추진실적			관계기관 협의 및 후보지 현장 실사(11.6.)	계획 수립 및 용역발주 (7월)	예비타당성 조사 시기 조정 건의 (5월, 국토교통부 장관)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄 : 비예산

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업기간 확정 예정

○ 사 업 비 : 추후확정(행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업비 확정 예정)

○ 위    치 : 천안시 서북구 성환읍 신방리 일원, 경기도 평택시 팽성읍 노와리 일원

○ 사업내용

구 분	합 계	거점산단 (종축장부지)	협력산단	일반산단 (북부BIT)	배후주거지 (성환,매주지구)
개발(예정)면적	232만평	127만평	55만평	27만평	23만평

□ 주요 추진실적(성과)

○ 후보지 최종 선정('23. 3월) 후, 사업시행자 선정 완료('23.4.)

-  신규 국가산업단지 성공적 추진을 위한 상생협약 체결('23.12.)
(국토교통부 + 충청남도 + 천안시 + LH)

○ 국가산업단지 신속 조성을 위한 행정절차 이행 및 계획수립 중

- 종축장 함평 이전 및 앵커기업 유치를 위한 예비타당성 조사 시기 조정('26. 상반기) 건의('24. 5월 / 道(천안시) → 국토교통부)

※ 대기업 유치와 TwO-Track 으로 추진

- 종축장 함평 이전 관련 공동 대응중(기획재정부, 국토교통부)

※ 종축장 이전사업 총사업비 조정 완료(’24. 11. / 기획재정부)

○ 입주수요 확보 149.2%(MOU 14개 기업 122.6%, 설문조사 26.6%)

□ 향후 추진계획

< 종축장 이전 >

○ '25.  1. : 입찰안내서 심의‧승인 및 입찰공고

○ '25.  2. : 현장설명회

○ '25.  3. ~ 7. : 기술제안서 작성‧제출 및 심의

○ '25.  8. : 실시설계 적격자 선정

○ '25.  9. : 실시계획 작성(인가까지 8개월 소요)

< 국가산업단지 조성 >

○ '25.  9. : 기본협약 체결

○ '25. 11. : LH 경영투자심사

○ '26. 상반기 : 예비타당성 조사 신청(국토교통부 → 기획재정부)

산업입지과   입지정책팀   팀장 박선욱   담당자 정종윤 (☎3446)