<2-5-4>	천안역사 증·개축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	천안역사 증·개축	기본설계 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료	공사 추진	공사 추진	공사 완료
추진실적			타당성 재조사 면제 건의 사업비 증액 편성	설계완료	공사 추진, 중앙투자심사 완료

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	8,160	5,000	0	3,160	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	4,440	4,440	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 48,700백만원(국비 29,900, 시비 18,800)

○ 사업내용 : 연면적 8,465㎡, 증축 2,953㎡, 개량 5,207㎡

□ 주요 추진실적(성과)

○ ’18. 11. : 사업시행 위·수탁 협약(철도공단&천안시, 증축 사업비 50% 분담)

○ ’19.  8. : 건축설계 착수(’23. 9. 완료 예정)

○ ’22.  6. : 민선8기 도지사 공약사항*(2-5-4. 천안역사 증･개축) 반영

* 추진계획 : 설계완료(‘23), 공사완료(’26) / 총 487억원(국비 299, 시비188)

○ ’22. 10. : 기재부･국토부 사업비 협의(국비 증액 없을시 타당성재조사 대상아님)

* 환승센터, 증축 확대 등 사업비 증가(487→800억원, 증313) *국비 299, 시비 501

○ ’23.  4. : 천안역 개량사업 도비(200억원) 지원 건의(천안시장)

○ ’23.  4. : 신한철 의원 5분 발언(사업의 원활한 추진 당부)

○ ’23.  5. : 민선8기 2년차 시군방문 현장(천안역) 방문 * 도비 200억 지원 약속

○ ’23. 11. : 설계안 확정(총사업비 1,121억 원)

○ ’24.  2. : 시행자 지정 및 실시계획 인가 고시(천안시)

○ ’24.  6. : 건축공사 추진(철도공단 발주)

○ ‘24.  6. : 천안시장, 현안사항 건의 * 도비 200억에서 100억 추가한 300억원 지원 건의

○ ‘24.  7. : 천안시 현안건의 검토의견 회신

* 민선8기 공약 감안, 당초 지원 약속한 200억원은 사업 진행도에 따라 단계적 지원 검토.

추가 도비(100억) 지원은 도 재정여건, 타 지역과의 형평성 등 고려 후 검토

○ ’24. 11. : 지방재정 중앙투자심사 완료

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 건축공사가 조속히 준공될 수 있도록 행정·재정적 지원

□ 향후 추진계획

○ ’26. : 공사 준공

도로철도항공과  철도물류팀   팀장 황선은   담당자 고은별 (☎4692)