<2-7-2>	충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	축산단지 조성		추진계획 수립	연구용역 추진	간척지 활용 사업구역 지정, 사업시행자 충남도 지정	실시계획 수립․승인, 기반공사 착공	기반공사 준공	축사, 분뇨 에너지화 시설 등 착공
추진실적			조성계획 수립(8월)	연구용역 (2월~)	사업지 지정(논산)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	200	0	200	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	133	0	133	0	0	0	0
24년	확보	263	263	0	0	0	0	0
	집행	58	0	58	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026년

○ 사 업 비 : 109,000백만원(국비 75,500, 도비 10,060, 시군비 23,440)

* 충남도는 기반조성 시행, 사업자 모집을 통해 축사, 에너지화, 도축 가공장 조성

○ 사업내용 : 도내 간척지(2개소/석문, 부사 간척지)에 스마트 축사 및 분뇨 에너지화 시설, 도축․가공장 등이 집적화된 축산 산업단지 조성

* 지역에 산재된 양돈농가 이전 및 분뇨 에너지화로 탄소중립 및 축산 구조개혁 추진

○ 중장기계획 반영 여부 : 충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획

□ 주요 추진실적(성과)

○『충남형 ICT 융복합 스마트 축산단지 조성 추진계획』수립(`22. 8.)

○ `22년 제2회 추경“간척지내 축산단지 조성 연구용역”예산 확보(`22. 9.)

○ 연구용역 보고회 개최(착수 `23. 3월 ⇢ 중간 `23. 6월 / 10월 ⇢ 최종 `24. 2월)

○ 연구용역 결과에 따른 스마트 축산 복합단지 조성계획 수립(`24. 3.)

* 당진 석문간척지(30만 두, 180ha) / 보령․서천 부사간척지(30만 두, 180ha)

** 가축분뇨에서 바이오가스(메탄) 생산 후 전력 또는 수소로 전환하고, 폐열을 ‘스마트팜’에 이용

⇨ ①시범모델(당진 석문 6만두/30ha) + ②복합단지(당진 석문, 보령서천 부사 54만두/330ha)

○ 간척지 부지확보를 위한 농식품부 관계부서 업무 협의(2회 / `24. 3.)

○ 농식품부에 ‘종합계획 반영’과 ‘활용사업구역 지정’ 요청(‘24. 3.)

○ 당진 시범모델(6만 두) 기반 조성 ‘실시계획‘ 용역비 12억원 계상(1회 추경)

* 농수산해양위원회 심의(4.17. /의결) ⇢ 예산결산특별위원회 심의(4. 22. /삭감)

○ 인․허가 등 사전행정절차 이행을 위한 ‘실무TF 추진단’ 운영 업무협의(5월)

○ 주민 설명 등을 위한 스마트 축산 복합단지 홍보 동영상 제작(6~7월)

○ 충남 한돈인 한마음 대회 스마트 축산 복합단지 홍보영상 상영(7월)

○ 스마트 축산단지 조성계획에 대한 시민, 사회단체 등 반대 민원 지속

○ 주민 반대로 당진 스마트 축산단지 ‘조성계획 중단’ 발표(도지사 / 7.8.)

* 돼지 사육 밀집 지역 등을 중심으로 내륙형 스마트 축산단지 시범모델 조성 추진

○ 돼지 밀집사육 시군(논산, 보령, 홍성) 대상, 축산단지 제안 협의(‘24. 7.~8.)

○ 제2차 간척지의 농어업적 이용 종합계획 관련, 농식품부 협의(8월)

* 간척지 내 돼지 사육이 가능하도록 종합계획 변경 건의(현재는 한우만 사육 가능)

○ 농식품부 제2차 간척지의 농어업적 이용 종합계획 수립 고시(9월)

⇨ 한우 이외 타 축종은 조건부(지자체장 및 의회 동의, 주민공청회 등) 허용

○ 도지사 선진 양돈사례(중국 양샹그룹 ‘스마트 돼지빌딩’) 시찰(11월)

○ 노후 양돈단지(논산 광석) 대상, 스마트 축산단지 조성 예산확보(12월)

○ 축산단지의 부정적인 선입견 해소를 위해 선진 사례(중국 돼지빌딩)를

중심으로 다큐멘터리 제작 추진(‘24. 12.~’25. 2.)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 지역 주민과 사회단체 등의 반대, 간척지 內 돼지 사육에 대한 정부의 부정적인 의견(환경오염 우려) 등으로 축산단지 조성은 어려운 상황

⇨ 중규모 형태의 시범단지를 내륙에 우선 조성 후 이를 모델로 지역주민, 정부 등 이해 설득을 통해 축산업의 미래 방향 지속 제시

□ 향후 추진계획

○ 간척지 조성이 어려운 상황으로 내륙형 축산단지 시범모델 조성 추진

- ‘24년 농식품부 공모사업(스마트 축산단지 조성)에 기 선정된 논산 ‘광석양돈단지’의 연차별 사업 추진

* 기존 시설 철거 및 기반공사(‘25~’26년) ⇢ 축산단지 시설 도입 및 준공(‘27~28년)

- 시범모델 조성 추가 발굴을 위해 양돈 밀집지역 관계 시군 지속 협의

축산과   스마트축산정책팀   팀장 주영하   담당자 이정배 (☎4106)