<3-12-7>	권역 감염병 전문병원 구축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	권역 감염병 전문병원 구축		‧설계진행 ‧중간설계 적정성 검토(조달청) ‧인허가 신청	‧실시설계 적정성 검토(조달청)	‧실시설계 추진	‧공사진행	‧준공 및 개원
추진실적		‧사업선정 ‧설계진행 ‧계약체결 ‧계획설계 적정성 검토 (조달청)	‧설계진행 ‧중간설계 적정성 검토(조달청) ‧인허가 신청	‧총사업비 조정 관련 질병관리청-순천향대부속 천안병원 간 협의	‧ 사업규모 조정 ‧ 중간설계 변경 및 조달청 적정성 검토

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	8,488	5,790*	0	0	0	2,698	0
	집행	550	0	0	0	0	550	0
23년	확보	13,434	0	0	0	0	13,434	0
	집행	1,667	0	0	0	0	1,667	0
24년	확보	20,634	0	0	0	0	20,634	0
	집행	1,521	0	0	0	0	1,521	0

* ’22년 국비예산 이월하여 사업추진 중

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 추진근거 :「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제8조의2(감염병병원)

§ 국가는 감염병 환자 치료 등을 위해 권역별 감염병 전문병원 설립ㆍ운영

○ 사업기간 : 2020∼2026년

○ 사 업 비 : 778억원(국비 409, 자부담 369)  ※ 총사업비 변경 예정

○ 사업내용

- 신종감염병 환자 진료ㆍ치료를 위한 충청권 감염병 전문병원 구축

- 감염병 대응 교육ㆍ훈련 체계 마련 및 감염병 환자 이송체계 재정비

□ 주요 추진실적(성과)

○ ʼ20. 6. : 충청권 감염병 전문병원 공모 선정(순천향대부속천안병원)

○ ʼ20. 7. : 충청권 감염병 전문병원 지정

○ ʼ20.11. ~ ʼ21. 2. : 설계업체 공모 및 선정

○ ʼ21.  3. ~ ʼ21.11. : 계획설계 및 조달청 적정성 검토

○ ʼ21.12. ~ ʼ22.12. : 중간설계 및 조달청 적정성 검토

○ ʼ23.  1. ~ ʼ24.10. : 사업비 총액 및 사업규모 조정(중간설계 변경 등) 관련 질병관리청-순천향대부속천안병원 간 협의

○ ʼ24. 11.~ ʼ24.12. : 중간설계 납품 및 실시설계 진행

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 자부담 비용 부담 증가로 사업규모 조정에 따른 순기 지연 우려

➤ 진행사항 월별 점검, 긴밀한 소통 등을 통해 집행관리 철저

□ 향후 추진계획

○ ʼ25.  1. ~ ʼ25.  3. : 실시설계 진행

○ ʼ25.  4. ~ ʼ26.  9. : 조달청 중간설계 적정성 검토, KDI/기재부 사업계획 적정성 재검토 → 검토 결과 및 재검토 결과 보완

○ ʼ26. 10. ~ ʼ26. 12. : 조달청 실시설계 적정성 검토

○ ʼ27.  1. ~ ʼ27.  6. : 조달청 입찰, 건설사 선정 및 공사발주 협의

○ ʼ27.  7. ~ ʼ27.  9. : 건설사 계약 및 착공신고 등 착공준비

○  ʼ27.  10.  ~ ʼ30. 05. : 착공(’27.10) 및 준공(’30.01~02), 시운전(3개월) 및 개원(’30.5.)

보건정책과  감염병대응팀   팀장 황평하   담당자 임윤주(☎4317)