<3-12-9>	농어촌의료서비스 개선 지원

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	농어촌의료서비스 개선 지원		공모사업 신청	설계 및 인허가	착공	준공 및 개소
추진실적			공모사업 선정	기본 및 실시설계 (8월)	실시설계 완료(5월), 착공(11월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	3,144	2,096	524	524	0	0	0
	집행	3,144	2,096	524	524	0	0	0
24년	확보	6,443	4,095	1,024	1,324	0	0	0
	집행	6,443	4,095	1,024	1,324	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023~2025년

○ 사 업 비 : 20,496백만원(국 6,908 도 1,727 군 11,861)

○ 사업내용 : 금산군보건소 이전신축비 지원

○ 수혜대상 : 금산군민

○ 중장기계획 반영 여부 : 제8기 충청남도 지역보건의료계획 연계 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ 보건복지부 국비지원사업 최종 공모 선정

- 1차년도(’23년) 20억원 지원 확정

- 2차년도(’24년) 41억원 지원 선정

- 3차년도(’25년) 자체 군비 확보 예정

○ 설계공모 (’23. 4. ~ 6.) 및 설계심의 완료 (’23. 8.)

○ (’23. 1. ~ ’24. 1.) 금산군 관리계획 변경

○ (’23. 8. ~ ’24. 5.) 기본설계 및 실시설계

○ (’24. 8.) 금산군보건소 이전 신축 건립공사 입찰 공고

○ (’24. 11.) 금산군보건소 이전 신축 착공

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 금산군「행복드림센터」이전과 연계 추진하는 사업으로 복합건축물 건립에 따른 행정절차 지연 우려

- 월별 실집행 실적 관리 등 집행관리 철저

□ 향후 추진계획

○ (’25. 1. ~ 3.) 발주청-건설사업관리용역사-건설사 공정 협의 및 공사 추진

○ (’25. 12.) 금산군보건소 이전 신축 준공 및 개소

보건정책과   보건행정팀   팀장 장동화   담당자 홍혜빈 (☎2641)