<4-14-5>	의병기념관 건립

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	충남 의병기념관 건립		기본구상 수립 및 유물조사	기본계획 수립 (건축,운영)	문체부 사전평가 행안부 투자심사	관리계획 승인 설계공모 및 설계	착공	준공 및 개관
추진실적			기본구상 수립용역 착수(10월)	기본계획 수립용역 착수(7월) 운영계획 수립(12월)	지구계획변경(9월) 지방재정투자심사(9월) 공공건축심의(12월)

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	20	0	20	0	0	0	0
	집행	17	0	17	0	0	0	0
23년	확보	150	0	150	0	0	0	0
	집행	149	0	149	0	0	0	0
24년	확보	500	0	500	0	0	0	0
	집행	10	0	10	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례
	○	입법명 :				조례명 : 충청남도 의병운동 기념사업 지원에 관한 조례
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결
								○

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2028년

○ 사 업 비 : 30,000백만원(도비 30,000)

○ 사업내용 : 기념관(전시실, 교육실, 강당), 체험관, 테마공원 조성

○ 수혜대상 : 충남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 2024~2028 중기지방재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ ('22. 8.) 충남 의병기념관 건립 관련 내포문화진흥포럼 개최

○ ('23. 4.) 충남 의병기념관 건립 기본구상계획 및 유물조사 완료

○ ('23. 7.~’24. 1.) 충남 의병기념관 건립 기본계획 수립 완료

○ ('23. 12.) 충남 의병기념관 건립지 제안(충남보훈관 옆)

○ ('24. 1.) 도지사보고, 충남의병기념관 건립지 확정(충남보훈관 옆)

○ ('24. 2.) 충남 의병기념관 기본계획 수립 및 타당성조사 완료

○ ('24. 10.) 통합사업 지방재정투자심사 조건부 승인

○ ('24. 12.) 공공건축심의 조건부 승인

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 충남의병관과 충남보훈관 사업 통합 결정('24. 1., 도지사 지시)

- 통합기관 통합콘텐츠 수립 필요성 증대에 따라 실시설계 전
통합콘텐츠 연구용역 추진

○ 통합기관 사업부지가 홍성·예산군 경계에 위치

- 통합기관 건립 과정에서 행정절차 이행을 위한 협의 병행 예정

□ 향후 추진계획

○ ('25. 1. ~ 4.) 충남의병기념관 건립 및 충남보훈관 리모델링 통합사업 통합콘텐츠 연구용역 추진

○ ('25. 4. ~ 6.) 실시설계 공모

○ ('25. 7. ~ ‘26. 4.) 기본 및 실시설계 추진

○ ('26. 5. ~ '28. 1.) 공사 착공 및 준공(건설본부)

○ ('28. 1. ~ '28. 6.) 통합기관 개관 준비 및 개관

복지보훈정책과 보훈팀   팀장 송은정   담당자 이용철 (☎4244)