<4-15-3>	충남도립예술의전당 신축

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
		○				○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	충남 예술의 전당 건립	기본계획 수립용역	행안부 타당성 조사	지방재정 투자심사, 설계공모 관리용역	설계공모	기본 및 실시설계	공사착공	준공 및 개관
추진실적		타당성 조사 및 기본설계 용역 완료	행안부 타당성 조사 완료	지방재정 투자심사 승인, 설계공모 관리용역 착수	설계공모 작품 심사 및 당선작 선정

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	0	0	0	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
23년	확보	1,000	0	1,000	0	0	0	0
	집행	0	0	0	0	0	0	0
24년	확보	1,900	0	1,900	0	0	0	0
	집행	668	0	668	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황 : 해당없음

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2027년

○ 사 업 비 : 126,000백만원

○ 사업내용 : 대공연장, 중공연장 및 공연지원 시설 조성

○ 수혜대상 : 충남도민

○ 중장기계획 반영 여부 : 2022 ~2026 중기지방재정계획 반영

□ 주요 추진실적(성과)

○ (’20. 9.) 도립 예술의전당 건립 재추진 계획 수립

○ (’21. 12.) 충남 예술의전당 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료

○ (’22. 11.) 행정안전부 타당성조사 완료

○ (’23. 8.) 행정안전부 중앙투자심사 결과 통보(조건부 승인)

○ (’23. 9.) 설계공모 및 대형공사 입찰방법 검토보고

○ (’23. 10.) 설계공모 운영위원회 구성, 설계공모 관리용역 발주

○ (’23. 11.) 지방건설기술심의워윈회(입찰방법) 의결

○ (’23. 12.) 설계공모 관리용역 착수, 공공건축심의(설계공모 방식) 의결

○ (’24. 2.) 일상감사 및 계약심사, 계약심의위원회 완료

○ (’24. 3.) 지명신청 공고, 질의접수 및 답변

○ (’24. 3.) 지명신청서 접수 및 지명자(5개팀)* 선정

* ➊주식회사 나우동인건축사사무소 & 2Portzamparc, ➋(주)시아플랜건축사사무소 & 3XN & ㈜엠디에이 건축사사무소, ➌에이앤유디자인그룹건축사사무소(주) & UNStudio, ➍운생동 건축사사무소(주) & ㈜행림종합건축사사무소, ➎(주)토문건축사사무소 & MVRDV & ㈜ 건축사사무소 메타

○ (’24.  6.) 국제지명 설계공모 심사 및 당선작 선정

- (주)시아플랜건축사사무소 + 3XN + ㈜엠디에이건축사사무소

○ (’24.  7.) 기본 및 실시설계 착수

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 사업 순기에 따른 연차별 사업예산 확보 필요

□ 향후 추진계획

○ (’25. 8.) 기본 및 실시설계 완료

○ (’25. 10.) 중앙투자심사 승인(2단계)

○ (’26. 3.) 중앙건설기술심의 등 행정절차 이행, 시공업체 선정

○ (’28. 9.) 공사 준공            ※ ’29년 개관 목표

문화정책과   문화시설팀   팀장 김성하   담당자 임현준 (☎3824)