<4-16-1>	e스포츠 메카 조성

❶ 공약 이행도

이 행 도 ※ 24. 12. 31. 기준						’24. 12월까지 목표달성여부
완 료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	기타
	○					○

❷ 사업별 추진계획 및 추진실적

구분	단위사업	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	e스포츠 상설경기장 건립		-부지 확보 -타당성조사 및 기본계획 수립	-행안부 지방 재정투자심사 -공공건축심의 -건축설계 공모 및 실시설계	-공사착공	-공사준공 -안전검사 및 시범운영 -경기장 개장	-경기장 투어 프로그램 운영	-MICE행사 및 각종 공연 등 개최
추진실적			-부지확보 -타당성조사 및 기본계획 수립 착수	-국비 40억원 확보 (’23~’25) -지방재정투자 심사(도) 및 공공 건축심의 승인 -경기장 설계용역 공모	-공사 착공 (’24.12.)
추진계획	e스포츠 생태계 활성화		-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 -청소년 진로 체험 교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로게임단 스폰서십 및 연고제 운영	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최 진로체험 교육, e스포츠 전문 인력 양성 -e스포츠 프로 게임단 스폰서십 및 연고제 운영 -글로벌 e스포츠 대회 개최	-도지사배 충남/전국 세대별 e스포츠 대회 개최, 청소년 진로체험교육, e스포츠 전문인력 양성 -e스포츠 프로 게임단 스폰서십 및 연고제 운영 -글로벌 e스포츠 대회 개최
추진실적			-도지사배 청소년 e스포츠대회 개최	-24년 대통령배 전국 e스포츠 대회 유치 -충남 e스포츠 정규리그 (청소년·직장인) 개최	-전국장애인 e스포츠대회 개최 -전국 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 개최 -도지사배 직장인·청소년 e스포츠 대회 개최

❸ 예산확보 및 집행내역 총괄

(단위 : 백만원)

구분		계	국비	도비	시군비	민자	자담	기타
22년	확보	100	0	100	0	0	0	0
	집행	100	0	100	0	0	0	0
23년	확보	3,300	1,000	1,000	1,300	0	0	0
	집행	3,300	1,000	1,000	1,300	0	0	0
24년	확보	11,496	1,750	9,596	150	0	0	0
	집행	10,122	1,000	1,650	0	0	0	0

❹ 공약별 입법현황

분류 (해당 분야에 O 표기)		국회 입법 관련 이행근거				지방의회 조례 관련 이행근거			비고
입법	조례
○	○	입법명 : 이스포츠(전자스포츠) 진흥에 관한 법률				조례명 : 충청남도 이스포츠(전자스포츠) 진흥 및 지원에 관한 조례, 충청남도 게임산업 육성·지원에 관한 조례
		발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결
					○			○

❺ 공약사업 세부 추진성과

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 308억원(국비 40, 도비 268)

○ 사업내용 : e스포츠 상설경기장 건립 및 운영, e스포츠 생태계 활성화

○ 수혜대상 : 전 도민

□ 주요 추진실적(성과)

<충남 e스포츠 상설 경기장 건립>

○ e스포츠 경기장 구축사업 문체부 공모 선정* 및 국비 40억원 확보

* 도↔한국콘텐츠진흥원↔정보문화산업진흥원 협약(’23.8.)/’23~’25/275.3억원(국 40, 도 235.3)

○ (’23. 1. ~ 4.) e스포츠 경기장 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역

○ (’23. 7.) 도 지방재정투자심사 조건부 승인  ※ 조건부이행 완료(’23.10.)

○ (’23. 10.) 도 공공건축심의 조건부 승인   ※ 조건부이행 완료(’23.11.)

○ (’23. 12.) 기본 및 실시설계 용역 공모, (’24. 1. ∼ 9.) 설계용역 추진

○ (’24. 1.) e스포츠 경기장 건립 기본 및 실시설계 착수보고

○ (’24. 2. ~ 3.) e스포츠 경기장 건립관련 자문위원회 구성 및 운영(2회)

○ (’24. 4.) 전문가 자문회의(4. 23.) 및 중간보고회*(4. 30.)

* ①외부진입로(북측) 보행자 동선 정리, ②지식산업센터 공유부분 등 생태 녹지 공간 정리, ③1, 2층 연결해주는 기둥모양 일치, ④건물 입면부분 라운드 처리 및 벽면 보완, ⑤MDF, 방재실 위치 조정 및 후면(북측) 출입구 확대 등

○ (’24. 5.) e스포츠 상설경기장 부지 분할 측량

○ (’24. 5.) 충남 e스포츠 브랜딩 및 활성화 방안 연구용역 계약

○ (’24. 5.) e스포츠 상설경기장 설계(평면, 입면, 배치 등) 관련 道 총괄건축가 자문

○ (’24. 5.) e스포츠 상설경기장 방송, 무대장비 관련 전문가 자문

○ (’24. 6.) e스포츠 상설경기장 운영 및 활성화 방안 자문회의 개최

○ (’24. 6.) e스포츠 상설경기장 부지 매매계약 및 권리의무승계

＊매매계약 작성, 명의변경 신청 및 권리의무승계 계약(아산시+충남정보문화산업진흥원+LH)

○ (’24. 6.) e스포츠 상설경기장 조경 및 인테리어 컨셉 협의

○ (’24. 6.) e스포츠 상설경기장 조경 및 인테리어 컨셉 협의

○ (’24. 6. 27.) e스포츠 상설경기장 부지 소유권 이전 등기 완료

○ (’24. 6. 28.) e스포츠 상설경기장 설계경제성(VE) 용역 추진

○ (’24. 7. 11.) 제로, 에너지 효율 예비인증 신청

○ (’24. 7. 12.) 건립사업 녹색건축 및 BF 예비인증 신청

○ (’24. 7. 16.) 건축 인허가 신청

○ (’24. 7. 18.∼7. 28.) 건립부지 지반 지열테스트 굴착 진행

○ (’24. 9. 24.) 이스포츠 상설경기장 건립 기본 및 실시설계 최종보고회

○ (’24.12. 13.) 이스포츠 상설경기장 건립 기공식

<충남 e스포츠 생태계 활성화>

○ (’23. 8.) ’24년 전국 대통령배 e스포츠 대회 유치  ※ 국비 3.5억원 확보

○ (’23. 9.) 충남 e스포츠 정규리그(청소년‧직장인) 개최(1,000여명 참여)

○ (’24. 1.) 2024 전국 장애인 e스포츠 유치 의향 제출(콘진원)

- (’24. 1.) 전국 장애인 e스포츠 개최 예정지(천안 2, 아산 2) 협의

- (’24. 3.) 전국 장애인 e스포츠 개최 관련 관련기관 2차 업무협의

- (’24. 3.) e스포츠 대회 개최 경기장 대관 가능관련 협의(아산시)

⇢ 장애인스포츠연맹에 대관 가능여부 회신

- (’24. 4.) 전국 장애인 e스포츠대회 현장 실사

○ (’24. 6. ~ 12.) e스포츠 산업인력양성 프로그램 운영

○ (’24. 7. 19 ~ 7. 21.) 전국장애인 이스포츠 대회 개최

○ (’24. 8. 17 ~ 8. 18.) 전국대통령배 아마추어 이스포츠 대회 개최

○ (’24. 9. 21 ~ 9. 22.) 도지사배 직장인·청소년 이스포츠 대회 개최

○ (’24. 12. 28) 이스포츠 대회운영 성과보고

□ 향후 추진계획

<충남 e스포츠 상설 경기장 건립>

○ (’24. 12 ~ ’26. 3.) 이스포츠 상설경기장 건립 공사 추진

- 건축(토목·기계·조경), 전기, 통신, 소방공사 추진

<충남 e스포츠 생태계 활성화>

○ (’25. 1. ~ 12.) 국제교류 및 초청전 형태 충남 이스포츠 대회 기획 및 운영(총 5회)

문화정책과   문화산업팀   팀장 조정림   담당자 조경화 (☎3829)